문서번호	토목부-13974
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장
김구		07/21 노우성
협조
	주무관		양준식

구룡지하차도 집수정 건축공사 반영 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

구룡지하차도 집수정 건축공사 반영 보고

구룡지하차도는 설계도면에 있는 집수정 공사물량 내역이 누락되어 미반영되고, 전기실 유지관리에 필요한 시설물 일부 보완이 필요하여 이에 보고드림

관련근거

❍ 동기강 2014-134호(`14.6.26.) 구룡지하차도 집수정 건축공사 승인 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 1개소, 지하차도 3개소)

❍ 공 사 비 : 221,555백만원 (7차: 8,906,500천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(7차 `13.5.9.~`14.9.30.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1,   ❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

감리단 보고내용

❍ 보고내용

- 구룡지하차도 집수정의 그레이팅, 스크린, 외부출입문, 사다리 설치에 대한 설계도면 물량이 내역서에 미 반영됨

- 구룡지하차도 집수정 유지관리를 위한 전기실 시설물(기초패드, 에폭시도장,출입문, 논슬립) 보완

❍ 변경 현황도

￭ 집수정, 전기실

￭ 집수정 외부출입구 계단실

❍ 물량 반영 내용

공 종		단위	수량	내 용	설치위치	비 고
내역누락	조적공사 (시멘트벽돌)	매	6,400	펌프실 및 전기실사이 벽체	집수정	도면표기
	출입문설치	개소	2	펌프실, 전기실 출입문설치	펌프,전기실	도면표기
	출입문설치	개소	1	외부출입구 출입문	외부출입구	도면표기
	창문설치	개소	1	외부출입구 창문설치	외부출입구	도면표기
	그레이팅 제작	개소	5	수중펌프 및 배관 개구부	펌프실	도면표기
	그레이팅 제작	개소	2	사다리설치를 위한 개구부	펌프실	도면표기
	사다리설치	개소	2	펌프실에서 집수정 유지관리용	펌프실	도면표기
유지관리시설	전기실 기초패드	M3	10	전기판넬설치를 위한 콘크리트	전기실	시설관리공단요구
	에폭시 도장	M2	143	펌프실 및 전기실바닥 방수	전기실	시설관리공단요구
	출입문설치	개소	1	연결통로의 냉난방기 차단용	연결통로	시설관리공단요구
	논슬립	M	55	외부출입구계단실의 미끄럼방지용	외부출입구	시설관리공단요구

❍ 공사비 증･감 현황                                      (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
1. 내역누락	-	10,166	10,166
2. 유지관리시설	-	6,270	6,270
3. 직접공사비	-	16,436	16,436
4. 제경비	-	5,564	5,564
5. 합 계	-	22,000	22,000
6. 부가세	-	2,200	2,200
총 공 사 비	-	24,200	24,200

조치계획

❍ 감리단 검토의견에 따라 추후 설계변경하여 도급비에 반영 조치코자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.