투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2회)시행(2020년 서울대공원 토목시설물 유지보수공사)

1. 현재 진행중인『2020년 서울대공원 토목시설물 유지보수공사(연간단가)』에 대한     설계변경(2회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 :『2020년 서울대공원 토목시설물 유지보수공사(연간단가)』

나. 도급금액 :***************************************************

다. 공사기간 : 2020. 03. 18. ~ 2020. 12. 31.

라. 계약업체 :*******************

마. 설계변경내용 : 도급비 변경 없이 관급자재만 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
** ******	***********	**************	*********
*** ** ** *	***********	**************	*
*********	**********	**************	*********

바. 사    유

- 콘크리트 단면보수, 표면보수 및 교면방수 물량 증ㆍ감에 따른 변경

- 신규공종(신축이음) 발생에 따른 변경

- 아스팔트 포장 물량 증ㆍ감 및 이에 따른 관급자재 변경

사. 예산과목

- 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물

유지보수 및 정비, 시설비, 토목시설물 정비.

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 방침서 1부. 끝.

주무관	손영민		시설과장	손병대		관리부장	전결 08/24 代유연호
협조자	주무관	한상길		총무과장	유연호
시행	시설과-6377	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7441	/전송	507-7230	/	sonym6974@seoul.go.kr	/	부분공개(5)