문서번호	설비부-12495
결재일자	2020.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	08/24 이달영
협조

서울광역푸드뱅크 이전 건립 기계설비공사

준공기한 연기 검토 보고

2020. 8.

도시기반시설본부

(설비부)

서울광역푸드뱅크 이전 건립 기계설비공사

준공기한 연기 검토 보고

광역푸드뱅크 이전 건립부지 내 공공자전거(따릉이) 중랑센터 이전이 지연됨에 따른 선행공종(건축) 준공기한 연기의 사유로 기계설비공사 준공기한을 연기하고자 함.

1		공사개요

○ 공 사 명: 서울광역푸드뱅크센터 이전 건립 기계설비공사

○ 위   치: 성동구 송정동 74-7 (중랑물재생센터 부지 내)

○ 규   모: 지상2층, 연면적 985.27㎡

○ 기   간: 2019.12.09.~ 2020.8.30.

○ 계 약 자: ****************

○ 계약금액: 130,585,140원

2		검토내용

○ 준공기한: 당초) 2020.8.30. 변경) 2020.12.31.

○ 연기사유: 선행공종(건축) 준공기한 연기에 따른 기계설비공사 준공기한 연기

○ 귀책소재: 서울특별시도시기반시설본부

3		조치계획

◯ 공공자전거(따릉이) 이전 지연으로 선행공종(건축) 준공기한이 연기됨에 따라 기계설비공사 준공기한을 위와같이 연기하고 총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임: 합의각서(서울광역푸드뱅크 이전 건립 기계설비공사) 1부  끝.