문서번호	시설보수과-6336
결재일자	2020.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		代윤동원	08/25 박문희
협조
	관리단속과장		박종윤

- 개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 구매‧설치

관급자재 변경구매 보고

2020. 08.

개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 구매‧설치

관급자재 변경구매 보고

「개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 구매‧설치」 현장에서 사용한 교량난간 물량이 변경되어 검토보고 후 조치코자 함.

※ 시설보수과-5816(2020.7.24.)호 : 정비구간 연장 현장 실정보고

Ⅰ		관급개요

○ 건    명 : 알루미늄제 교량난간 변경구매‧설치

○ 공 사 명 : 개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

○ 계 약 자 : 에스더블류도로안전(주) 대표 신희수

○ 규    격 : 알루미늄제교량난간 SW-K05-SB5, SW-K10-SB4

○ 계약물량 : SB5등급 1,049경간, SB4등급 23경간

○ 계약금액 : 577,009,801원

○ 납품기간 : 2020.09.16

Ⅱ		변경구매(정산) 검토보고

○ 변경구매 수량검토

품 명	식별번호	규 격	수 량 ( 톤 )
			당초	변경	증 감
교량난간 30121703	22908298	알루미늄제교량난간 SW-K05-SB5	1,049	1,258	(증) 209
	22854656	알루미늄제교량난간 SW-K10-SB4	23	24	(증) 1

○ 변경사유 : 정비구간 연장에 따른 물량증가

○ 변경금액 : 689,952,680원 (조달수수료 별도)

○ 예산과목

- 교량안전과, 일반교량관리, 신정교접속교외 1개소 차량방호울타리교체, 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 개화지하차도외 1개소 방호울타리 교보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 개화지하차도외 1개소 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

○ 관급자재 구매‧설치 변경물량에 대하여 변경계약 체결

○ 상기와 같은 변경물량 등을 변경구매후 예산과목별 정산 지급

붙임  변경 내역서 1부.  끝.