문서번호	시설관리과-15240
결재일자	2020.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
황인성		이승영	08/25 고신석
협조

공사현장 실정보고에 따른 검토 보고

(신길동 185-1번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사_2구간)

2020. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

1. 제    목 : 현장실정 보고사항 검토의견

2. 관련근거

공사감독2처-11570(2020.07.20.)

3. 공사현황

가. 공 사 명 : 신길동 185-1~187-4번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : D=80~300㎜, L=1,002m

다. 공사기간 : 2020. 5. 11. 〜 2020. 11. 6.

라. 계약금액 : ************

마. 시 공 사 : *****************

바. 감 독 자 : 서울시시설관리공단(공사감독2처)  담당 김세웅

4. 시설관리공단 보고 및 검토의견

연번	제목	시설관리공단 보고내용 및 조치의견	검 토 의 견	비고
1	2구간 추가정비 시행(기존 CIP관 부설구간)	▶ 2구간(D=200mm, L=40m) 작업 중 종점 기존관 연결부에 CIP관이 발견되어 추가정비가 필요한 실정임. - CIP관 발생에 따른 2구간 추가정비는 횡단굴착 후 기 보고했던 사안으로 추후 설계변경 시에 반영하고자 함. - 실 시공수량(L=40m→78m, 중형변실 2개소 추가정비 등) - 개략공사비 : 12,456천원(증)	〇 검토의견 : 원안승인
2	2구간 도종변경 (A-2 → CA-2)	▶ 2구간은 도종이 A-2로 당초 설계되어 있었으나, 현장굴착 결과 아스콘 포장 하부에 콘크리트 포장이 있어 CA-2로 확인 되었음. - 해당구간 도로포장 파쇄작업 결과 도종이 CA-2로 확인되었으며, 현장 여건에 따라 시공 후 설계변경 시에 반영하고자 함.	〇 검토의견 : 원안승인
3	2구간 가정인입관 토공수량 반영	▶ 2구간 급수관 토공수량이 설계에 누락되어 있어 시공수량 반영이 필요한 실정임. - 200mm 관 부설 위치로부터 터파기 굴착폭 이상 이격된 기존 급수관에 연결하는 경우에 한하여 급수관 토공수량 반영이 적정하다고 판단되며, - 상기 2구간의 경우 하수관 하단부에 급수관이 위치하여 추가 굴착 작업이 불가피한 실정으로 당초 설계에 누락된 토공 수량을 설계변경 시에 반영하고자 함. - 개략공사비 : 3,900천원(증)	〇 검토의견 : 원안승인

5. 조치의견

○ 상기와 같은 실정보고에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 검토의견을 통보코자 하며 향후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 공단현장실정보고서 각1부.  끝.