문서번호	방재시설부-6562
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이정국		서관석	07/22 임춘근
협조

「신림2 빗물펌프장 설치공사 건설폐기물처리용역」

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.

도시기반시설본부

방재시설부

『신림2 빗물펌프장 설치공사 건설폐기물처리용역」

준공기한 연기 검토 보고

우리부에서 시행 중인「신림2 빗물펌프장 설치공사」관련 “공사중 교통소통대책 심의 지연”, “연계공사(관악구청) 간섭” 및 “현장여건 상이로 인한 설계변경” 등 절대공기 부족으로 공사기간 연장에 따른 폐기물처리용역 준공기한 연기 검토 보고임.

1		관련근거

❍ 신림감제2014-204호(2014.7.11) :【폐기물처리용역 준공기한 연기요청】

2		폐기물처리용역 개요

구 분	폐기물 처리용역
용 역 명	신림2 빗물펌프장 설치공사 건설폐기물처리용역
위 치	서울시 관악구 신사동 496
규 모	- 폐콘크리트 : 2,881톤 폐아스콘 : 2,552톤 혼합폐기물 : 19.53톤
용역기간	- 총차: 2013.03.19~2014.07.30 - 1차: 준공(2014.6.20.)
도 급 비	총차 109백만원(1차 80백만원)
용 역 사	지준, ㈜진흥중공업

3		검토내용

❍ 준공기한 연기사유

“공사중 교통소통대책 심의 지연”,“연계공사(관악구청) 간접” 및 “현장여건 상이로 인한 설계변경” 등 절대공기 부족에 따른 공사기간 연장에 맞추어 연기

❍ 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	'13.03.19 ~ '14.07.30	'13.03.19 ~ '14.12.31	증)150일

❍ 귀책사유 및 지체상금 부과 여부

- 귀책사유 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미부과

4		조치의견

❍ 상기 검토내용과 같이 폐기물처리용역 기간을 “공사중 교통소통대책 심의 지연”, “연계공사(관악구청) 간섭” 및 “현장여건 상이로 인한 설계변경” 등 절대공기 부족에 따른 공사기간 연장에 맞추어 연기함이 타당하다고 사료됨.

붙임 : 1. 감리단 검토 의견서 1부.

2. 공사 준공기한 연기 검토보고서 1 부. 끝.