투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(분전반 등 13종) 납품 기한 연기 의뢰(퇴계로<2단계> 보행친화공간 재편 전기공사)

우리 본부(설비부)에서 시행 중인 『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』와 관련, 관급자재(분전반 등 13종)에 대하여 납품기한 연기을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 납품 현황(납품기한 연기)

연 번	납품요구번호 (계약번호)	물품식별번호	품 명(규 격)	계약 수량	납 품 기 한		비 고
					당 초	변 경
1	**************** *************	********	분전반 (4회로, 노출형)	7	2020. 8.31.	2020.10.31.
2	**************** *************	********	조명제어장치 (가로등선로감시기)	7	2020. 8.31.	2020.10.31.
3	**************** *************	********	가로등주 및 부속자재 (8m, 1등용)	8	2020. 8.31.	2020.10.31.
		********	가로등주 및 부속자재 (9m, 1등용)	105	2020. 8.31.	2020.10.31.
4	**************** *************	********	도로조명설비 (LED 100W)	86	2020. 8.31.	2020.10.31.
		********	도로조명설비 (LED 125W)	27	2020. 8.31.	2020.10.31.
		********	도로조명설비 (LED 50W)	113	2020. 8.31.	2020.10.31.
5	**************** *************	********	가로등주 및 부속자재 (스테인리스암)	113	2020. 8.31.	2020.10.31.
6	**************** *************	********	교통신호등 (LED보행등보조-숫자)	24	2020. 8.31.	2020.10.31.
		********	교통신호등 (교통신호제어기)	6	2020. 8.31.	2020.10.31.
		********	교통신호등 (LED차량등 1면4색)	6	2020. 8.31.	2020.10.31.
		********	교통신호등 (LED차량등 1면3)	27	2020. 8.31.	2020.10.31.
		********	교통신호등 (LED보행등 1면2색)	21	2020. 8.31.	2020.10.31.

2. 연기사유 : 선행공정(토목공사) 준공연기에 따른 해당 전기공사의 준공기한 연기로 전기공사에 필요한 관급자재 적기 납품을 위해 연기

3. 납품기한 연기 귀책소재: 도시기반시설본부

4. 지체상금 부과 여부: 미부과

붙 임 : 관련 보고서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	전상은		건축설비과장	김은덕		설비부장	08/25 이달영
협조자
시행	설비부-12523	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(7)