문서번호	설비부-12577
결재일자	2020.8.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	08/25 이달영
협조

『서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기·통신공사』

준공기한 연기 검토보고(제1차,총차)

2020. 8.

도시기반시설본부

(설비부)

『서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기·통신공사』

준공기한 연기 검토보고(제1차,총차)

『서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기·통신공사』와 관련하여, 책임건설사업관리기술자로 부터 공사기간 연기보고서가 제출되어 검토하고 보고 드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 계약기간 변경승인 요청(울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사_1차,총차)

: 동일감리 제20-190호(2020.08.18.)

□ 계약기간 변경승인 요청(서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기공사_1차,총차)

: 동일감리 제20-192호(2020.08.18.)

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 서울의료원 권역응급의료센터 건립 공사

공 사 명	전기공사	통신공사
공사기간	- 총 차 : `19.03.26.~`20.09.25. - 1 차 : `19.03.26.~`20.08.31.	- 총 차 : `19.03.27.~`20.09.26. - 1 차 : `19.03.27.~`20.08.31.
도 급 비	- 총 차 : 1,338,419,940원 - 1 차 : 700,000,000원	- 총 차 : 589,611,000원 - 1 차 : 250,000,000원
시 공 사	㈜ 엔큐 대표 정석용	㈜ 세호영상 대표 박석신
감 리 사	㈜종합건축사사무소 동일건축	㈜종합건축사사무소 동일건축 ㈜토문엔지니어링 건축사사무소

Ⅲ
		검토 내용

□ 공사기간 연기사유

○ 권역응급의료센터 추가증축(4층,5층)으로 인한 선행공정(건축분야) 공사기간 연장에 따른 후속공정(전기 및 통신분야) 공기연장

□ 공사기간 연기

○ 공사명 : 서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기공사

(단위 : 원)

구 분	당 초		변 경
	총차	1차	총차	1차
도 급 비	1,338,419,940원	700,000,000원	변동없음	변동없음
공사기간	2019.03.26. ~ 2020.09.25.	2019.03.26. ~ 2020.08.31.	2019.03.26. ~ 2021.07.30.	2019.03.26. ~ 2020.12.30.
연장일수			- 기한연기 : 1차 121일(증) 총차 308일(증)

○ 공사명 : 서울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사

(단위 : 원)

구 분	당 초		변 경
	총차	1차	총차	1차
도 급 비	589,611,000	250,000,000	변동없음	변동없음
공사기간	2019.03.27. ~ 2020.09.26.	2019.03.27. ~ 2020.08.31.	2019.03.27. ~ 2021.07.30.	2019.03.27. ~ 2020.12.30.
연장일수			- 기한연기 : 1차 121일(증) 총차 307일(증)

□ 추가증축으로 인한 선행공정(건축분야) 공기연장으로 인한 후속공정(전기 및 통신)  공사기간 연장이 적정 함.

Ⅳ
		보고자 의견

□ 책임건설사업관리기술자가 보고한 공사기간 연장 검토(추가 증축관련 선행공정 공기연장에 따른 후속공정 공사기간 연장) 내용이 적정하여 현장여건에 맞추어 공사기간을 연장하여 사업관리에 만전을 기하고자 함.

붙   임 : 공사기간 연장요청 검토의견서(전기,통신) 각 1부.  끝.