문서번호	공원여가과-2936
결재일자	2020.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	공원여가과장	공원부장
김상금	강계표	08/25 김인숙

- 2030 한강 여가활성화 기본계획 수립 연구 용역 -

용역기간 연장 검토 보고

2020. 8.

한강사업본부

(공원여가과)

- 2030 한강 여가활성화 기본계획 수립 연구 용역 -

용역기간 연장 검토 보고

2030 한강 여가활성화 기본계획 수립을 위한 연구용역 관련하여 연구내용의 내실화를 위해 용역기간의 연장이 필요하여 이에 대해 검토·보고 드림

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2030 한강 여가활성화 기본계획 수립 연구용역

○ 용역기간 : ***************************

○ 용 역 비 :**************

○ 용 역 사 : ************************

○ 용역내용

- 한강 여가활동 여건 및 여가서비스 현황 조사

- 여가활동 환경 변화 및 여가트랜드 분석

- 한강 여가활동에 대한 시민수요 분석 (설문조사)

- 한강 여가활성화 비전 및 목표 설정

- 한강 여가활성화 기본계획 수립 (중점 추진과제) 및 실행계획 수립 등

□ 그간 추진사항

○ 착수보고 및 외부전문가 자문 : 2019. 9. 20.(금)

- 주요 자문의견

․ 한강의 자연, 시설, 프로그램이 조화롭게 어우러질 수 있는 방안 모색

․ 이용시설‧시기‧연령별 분석으로 다양한 계층의 요구사항 반영

․ 한강변 변화 고려 (노들섬, 탄천 수변생태․여가문화 공간 조성사업 등)

․ 한강 여가서비스에 대한 홍보 및 통합마케팅 필요 등

○ 1차 중간보고 : 2019.12. 9.(월)

- 주요 자문의견

․ 시민들의 다양한 요구를 반영하기 위한 설문조사의 실시

․ 한강의 자연과 생태역사를 특색있는 문화프로그램으로 기획

․ 한강 이용형태별 정책지원 및 제안 필요, 수상레포츠 활성화 관련 가이드라인 마련 등

○ 한강시민위원회 보고 : 2019.12.18.(수)

- 주요 의견

․ 한강의 역사문화자원과 연결된 한강의 여가기능에 대한 고려

․ 자연성회복과 균형을 맞추는 여가 활성화 방안 강구하되 안전도 측면도 고려

․ 자발적 시민참여방식에 대한 고려

․ 빅데이터 분석을 통한 여가 트랜드의 추세도 고려

․ 자연성회복과의 연계 및 외국사례의 분석을 통해 장기적 비전 제시 등

○ 2차 중간보고 : 2020. 5.14.(목)

- 주요 자문의견

․ 문화시설의 집적화에 대한 고민이 필요

․ 지나친 하드웨어 중심에서 아이디어 활용 방식으로 접근의 전환 필요

․ 자연과 인간의 공존을 위한 복원과 이용이 병행되도록 생태계에 대한 고려 필요

․ 기본자료를 기반으로 구체화되어야 하는데 자료수집단계에 머무르는 아쉬움 등

․ 코로나19라는 예측할 수 없는 상황으로 연구수행에 어려움이 있어 기간 연장 필요

○ 최종 보고 : 2020. 8.12.(수)

- 주요 자문의견

․ 시민들의 의견을 반영 할 수 있는 시스템 마련 필요

․ 새로운 시설 도입보다 기존 시설의 기능 개선 제시 필요

․ 한강에서도 금연, 금주에 대한 정책적 방향 제시 필요

․ 한강 여가의 새로운 문화의 창조로 관광 자원으로 발전 가능성 있음

․ 코로나19와 집중호우로 연구수행에 어려움이 있어 기간 연장 필요

□ 용역변경 개요

○ 변경내용 : 용역기간 연장

계약금액	당 초	금126,419,000원(금일억이천육백사십일만구천원)
	변경후	금126,419,000원(금일억이천육백사십일만구천원)
	증․감액	-
계약기간	****	**************************
	***	***************************

○ 변경사유

- 코로나19와 집중호우로 인해 현장 연구의 어려움이 발생한 점 등에 기인하여 내실있는 연구결과의 도출을 위해 용역기간 연장 필요

○ 지체상금 : 미부과

- 내실있는 연구결과 도출을 위한 연구내용 보완 및 구체화, 전문가 자문의뢰 등에 따라 수행기간이 지체된 사안으로 지체상금 미부과

□ 향후계획

○ 2020. 9.30. : 용역완료   끝.