투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약기간 변경의뢰(서울광역푸드뱅크센터 이전건립 기계설비공사)

서울광역푸드뱅크센터 이전건립 사업 관련, 기계설비공사 계약기간을 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명: 서울광역푸드뱅크센터 이전건립 기계설비공사

2. 계 약 자: ****************

3. 계약번호: 20191201BAB-00

4. 계약금액: *************(계약금액 변경없음.)

5. 변경사항

○ 계약기간: 당초) 2019.12.09. ~ 2020.08.30. 변경) 2019.12.09. ~ 2020.12.31.

6. 변경사유: 선행공종(건축) 준공기한 연기에 따른 기계설비공사 준공기간 연장

7. 지체상금 부과여부: 미부과 (귀책소재: 서울특별시도시기반시설본부)

붙임: 1) 준공기한 연기 검토서 1부

2) 합의각서             1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	08/25 이달영
협조자
시행	설비부-12530	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(5)