문서번호	교통정보과-12777
결재일자	2020.8.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로정보팀장	교통정보과장
김진구		최종선	08/26 이수진
협조

『서울 C-ITS 실증사업』관련

총차 계약 변경 및 장기3차 계약 시행 계획

2020. 8

교통정보과

『서울 C-ITS 실증사업』관련

총차 계약 변경 및 장기3차 계약 시행 계획

올인원단말기 원가산정용역을 반영하여 총차 계약을 변경하고, 장기2차 계약 준공에 따라 장기3차 계약을 시행하고자 함

□ 추진근거

○ 사업관리단 보고 : 서울 C-ITS 실증사업 장기3차 계약 요청(보완)

(건설기술연구원 미래융합본부-11654호, 2020.08.26.)

□ 계약개요(총차)

○ 계약건명 : 자율협력주행 등 미래교통 혁신 기반 조성을 위한 서울 C-ITS 실증사업

○ 계약금액 : 22,706,389,970원

○ 계약기간 : 2019.01.31.~2020.12.31.

○ 계약상대자 : 에스케이텔레콤(주)외 2개사

□ 총차 계약 변경 계획

○ 변경사유 : 올인원단말기 원가산정용역 결과 반영

－ ㈜티머니와 체결한 “서울 C-ITS 실증사업 관련 물품공급 및 기술지원, 유지관리 협약 제5조”에 따라 한국물가협회에서 시행한 원가조사결과 반영

***********************************

********************************************************

□ 장기3차 계약 시행 계획

***************************

※ 총차 금액에서 장기1차, 장기2차 준공금액을 제외한 금액임

○ 계약기간 : 계약일로부터 ~2020.12.31.

○ 주요 과업내용

－ 미래교통기반 첨단도로인프라 조성

‣ ( 규  모 ) 31.2Km(기 구축 114.4km)

‣ ( 대  상 ) 통일로, 경인마포로 등 중앙버스전용차로 운영도로

‣ ( 인프라 ) 교통신호, 딥러닝기반 보행자 감시 등 404식 인프라 설치

－ 올인원(All in One) 5G 커넥티드 카 단말 장착 및 보급

‣ AFC/BMS/C-ITS 기능이 통합된 올인원단말기 설치(700대)

‣ WAVE(C-V2X 포함)․5G 통신이 가능한 5G V2X 설치(700대)

－ 초저지연 C-ITS 정보 공유 플랫폼, 교통안전 빅데이터 플랫폼 구축 등

구분		**	**	******
연 장		******	******	******
대상 도로축		************** *************	************* ************* **************	************ *****
5G V2X		***************	******	****
올인원단말기		*	******	****
첨단운전자지원시스템		*	*	******
주요인프라	노변기지국	***	***	***
	딥러닝	*********	*********	*********
	교통신호제어기	****	***	***
	신호개방옵션보드	****	***	***
	전기차충전소	**	*	*
	굴착관로	******	****	******
센터시스템	센터HW	***********	************	*
	상용SW	**	*	*
	응용SW	*****	******	***********
	인테리어	**	*	*
	공간정보구축	******	******	******

<대상도로 및 주요 시스템 물량 >

구분	공 종 명	***		****		****		********
		**	******	**	******	**	******	**	******
제작. 납품 설치 부분	차내단말기(예비품 포함)	*****	**********			*****	**********	***	**********
	딥러닝검지시스템	***	**********	***	********	***	********	***	**********
	OBU(통신단말기)	*****	**********			*****	**********	***	********
	첨단운전자지원시스템	*****	**********					*****	**********
	졸음감지센서	**	******			**	*****
	휴대용 공사 알림장치	**	*******					**	*******
	노변기지국(RSE)	**	**********	**	********	**	********	**	********
	교통신호제어기, CIB보드	***	**********	***	**********	**	********	**	********
	소 계		***********		**********		**********		*********
구매 설치 부분	동영상수집기(CCTV)	*	********	*	********		**		**
	돌발상황검지기(레이더)	*	********		**		**	*	********
	교통신호제어기 설치	***	********	**	********	**	********	**	********
	전기통신	******	********	*****	********	*****	********	*****	*******
	구조물	*	********	*	********		*******		**
	토목	*****	*******	*****	******	***	*******	*****	********
	안전시설물	*	********	*	********	*	******		**
	전기충전소	*	******	*	******		**		**
	소 계		*********		*******		*******		********
센터 시스템	센터 하드웨어	1	677,163	1	677,163		12,596		0
	상용 소프트웨어	1	222,058	1	222,058		0		0
	응용 소프트웨어	1	1,766,809	1	758,483	1	542,539	1	414,590
	관제센터 인테리어	1	589,075	1	589,075		6,516		0
	3차원 공간정보 구축	121.4	165,251	53.9	73,371	60.5	128,551	31.2	42,469
	소 계		3,420,355		2,320,149		690,202		457,059
부대 시설비	자율주행영상콘텐츠제작	1	203,830	0.56	114,125	0.44	89,705		0
	개관행사 이벤트	1	256,170	1	203,560	1	96,390		0
	이 전 비	1	451,220	1	138,730	1	229,080	1	186,280
	소 계		911,220		456,415		415,175		186,280
총 원 가			20,842,144		5,640,044		6,886,652		7,465,794
부 가 가 치 세			2,084,211		564,044		688,665		756,209
도 급 액			22,926,358		6,204,048		7,575,318		8,318,303

< 세부내역 >

□ 조치계획

○ 총차 계약 변경 및 장기3차 계약 의뢰(재무과)

□ 향후일정

○ 총차 계약변경 및 장기3차 계약 ---------------- 2019. 8. 27

◆  붙임 : 1. 사업관리단 공문 1부.

2. 감리단 공문 보고 1부.

3. 장기3차 계약내역서 1부.

4. 총차 계약내역서 1부.

5. 총차 계약 변경 합의각서 1부. 끝.