투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	용역기간 2차 연장 계약 의뢰(마포대교 경관조명 및 가로등설비 개선사업 실시설계 용역)

우리 사업소에서 시행 중인 ‘마포대교 경관조명 및 가로등설비 개선사업 실시설계 용역’의 용역기간 부족으로 기한 내 준공이 불가하여 아래와 같이 용역기간의 2차 변경 계약을 의뢰드리오니, 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 마포대교 경관조명 및 가로등설비 개선사업 실시설계 용역

나. 계약상대자 : ******************

다. 계 약 일 : 2020. 05. 12.

라. 착 수 일 : 2020. 05. 15.

마. 용역 계약 기간

용 역 계 약 기 간			연장 사유
최 초	변 경(1차)	변 경(2차)
2020.05.12. ~ 2020.07.23.	2020.05.12. ~ 2020.08.28.	2020.05.12. ~ 2020.09.11.	- 좋은빛심의 결과 보완자료 검토 및 사업추진과 관련된 사전심사(특정기술선정심사, 계약심사) 절차 이행을 위한 용역 기간 부족

바. 계약금액 : ******************************

사. 귀책사유 : 서울특별시(서부도로사업소)

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

자. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계),

도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 용역기간 연장 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김성균		기전과장	08/26 서수일
협조자	주무관	장재영
시행	기전과-8532	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 기전과 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8394	/전송	02-300-8410	/		/	부분공개(7)