문서번호	정수시설과-1399
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양영민		안길찬	07/22 박기석
협조

설계변경 심의위원회 개최결과보고

(전기설비보수공사-연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

강북아리수정수센터

설계변경 심의위원회 개최결과보고

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 전기설비 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 04. 7 ~ 2014. 12. 20

다. 도 급 액 : 64,626,800원

라. 공사개요

1) 본관동 사무실 재배치에 따른 정비공사

2) 외등(LED) 램프 교체공사 1식

3) 동파 방지용 전원 정비공사

4) 등기구 Bracket 개선공사

5) 탈수기동 전동밸브 신설 전기공사 1식

6) 취수장 방문자 알람 시스템 설치공사 1식

7) 침전지 외등(LED) 교체공사 1식

8) 취수장 가스누출 경보설비 신설공사 1식

9) 취수장 살충등 신설공사 1식

10) 도수관로 전기방식 부식단자 교체공사 1식

마. 도 급 자 : ㈜ 용 우   대표 김헌영

2. 보 고 내 용

가. 설계변경사유

1) 당초 계약내역서 중 본부 연간단가 공종별 내역서에는 일위대가 및 자재를 최대한 반영하였으나, 우리센터에서 보수할 공종 및 일위대가 적용 대상이 없는 항목은 전액 감액조치 하였으며, 탈수기동 및 취수장 방문자 알림 시스템 등 신설 공사로 인한 물량이 증가함.

2) 작업지시에 의한 물량 증.감 주요내용

- 공사물량 증.감 : 23개 공종 (전원케이블 포설 및 배관공사 1식,                             분전반설치 1면, 취수장 방문자 알림 시스템1식 등)

3) 주요공종 및 물량 변경내용

No	주요공종	단위	물 량		(증.감)
			당 초	변 경
8	난연성비닐절연접지케이블 (0.6/1kV F-GV6㎟)	M	0	163	163
10	난연성비닐절연접지케이블 (0.6/1kV F-GV16㎟)	M	35	0	35
20	가교폴리에틸렌(F-CV) (0.6/1kV F-CV 3C 4㎟)	M	22	94	72
21	가교폴리에틸렌(F-CV) (0.6/1kV F-CV 3C 6㎟)	M	685	0	685
26	가교폴리에틸렌(F-CV) (0.6/1kV F-CV 4C 6㎟)	M	305	96	209
27	가교폴리에틸렌(F-CV) (0.6/1kV F-CV 4C 10㎟)	M	0	67	67
29	가교폴리에틸렌(F-CV) (0.6/1kV F-CV 4C 25㎟)	M	35	0	35
35	제어용 난연케이블(F-CVV) ((0.6/1kV F-CVV 12C 1.5㎟)	M	240	475	235
37	제어용 난연케이블(F-CVV-SB) ((0.6/1kV F-CVV-SB 3C 1.5㎟)	M	240	475	235
48	강제전선관 (아연도36MM)	M	0	42	42
49	강제전선관 (아영도36MM)	M	0	58	58
59	플렉시블 전선관 (고장력 방수 28MM)	M	162	8	154
80	파상형경질비닐전선관 (ELP 30MM)	M	663	0	663
136	글로브 교체 (외등 14‘)	개	172	121	51
143	전동밸브 전원반 설치	면	1	0	1
149	서지보호장치 설치 (AC 단상 220V 80kA)	개	12	0	12
174	조명 등기구 교체 (직부등/벽부등 LED 22W)	개	0	108	108
175	조명 등기구 교체 (직부등/벽부등 LED 51W)	개	0	14	14
177	카운터 스위치 (DS-222)	개	0	5	5
178	전동밸브 분전반 설치	면	0	2	2
179	취수장 방문자 알림 시스템	식	0	1	1
180	경보기기 설치 (경광등&사이렌)	셋	0	1	1
181	취수장 살충등 설치	개	0	3	3

4) 공사비 변경내용

(단위:원)

구 분		당초금액	변경금액	증,감액	비 고
합 계		64,626,800	64,096,000	(감) 530,800
도급비	공급가액	58,751,637	58,269,092	(감) 482,545
	부가가치세	5,875,163	5,826,908	(감) 48,255
	소 계	64,626,800	64,096,000	(감) 530,800

3. 조치의견

1) 위와 같이 시공물량 증․감으로 인한 설계변경 사항을 자체 심의한 결과 원안대로     가결됨에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고 계약코자 합니다.

첨부 :  1. 설계변경 심의결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.끝.