문서번호	한옥건축자산과-8631
결재일자	2020.8.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
박강덕		최장길	08/28 신동권
협조

한옥체험시설 준공기한 연장 요청 검토 보고

(가회동 31-122 외 1)

2020. 8.

한옥체험시설 준공기한 연장 요청 검토 보고

(가회동 31-122 외 1)

한옥체험시설 조성 공사(설계용역) 시행 위탁 중인 SH공사로부터 제출된 준공기한(설계용역 계약기간) 연장 요청에 대한 검토 보고임

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 서울 공공한옥 한옥체험시설 조성(설계용역)

○ 위    치 : 종로구 가회동 31-122번지 외 1필지(대지면적 605㎡)

○ 공사내용 : 증축 및 대수선

○ 사업기간(사업비) : ’20. 2. ~  ’21. 6.(금 3,045백만원)

□ 추진경위

○ ’19.03.05. : 한옥매입 완료(매입가 5,350백만원)

○ ’19.12.06. : 공공한옥 운영자 선정 [㈜락고재]

○ ’20.02.27. : 설계공모 및 공사추진 의뢰(서울시 ⇒  SH공사)

○ ’20.08.14. : 공용건축물 협의(서울시 ⇒  종로구)

□ 준공기한(설계용역 계약기간) 변경(연장) 내용

구 분	당 초	변 경	연장일수	연장사유
설계 용역 (1차)	‘20.05.04.~ ‘20.08.31	‘20.05.04.~ ‘20.09.30	30일	- 심의 및 자문결과 보완(20일) 코로나19로 인한 업무공백(10일)
설계 용역 (2차)	‘20.09.01.~ ‘20.10.30	‘20.10.01.~ ‘20.11.29	30일

- 연기 귀책사유 : SH 공사

□ 검토내용

○ 설계용역 계약기간 변경(연장) 사유 적정 여부

− 추가로 건축자산위원회(자문) 심의를 받도록 한 결과 기본계획 확정 내용과 상이하게 승강기(리프트)를 설치하도록 의결되어 이에 대한 반영을 위한 건축 설계기간 소요

· 심의 기간 10일, 설계 기간 10일 : 총 20일 연장 적정

− 서울시청 코로나19 확진자 발생으로 검토, 보고 등 업무 공백 발생

· 재택근무 및 격리 : 총 10일 연장 적정

□ 검토결과

○ SH공사로부터 제출된 준공기한(설계용역 계약기간) 연장 요청 검토결과 위와 같은 사유로 설계용역 기간 30일 연장은 적정하다고 판단됨

붙임 : 준공기한 연장 검토 요청서 및 관련서류 각 1부.  끝.