문서번호	토목부-14160
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목부장
여용석		07/22 노우성
협조

<강남순환도로민자구간>

6-2공구 상주감리원 추가 투입 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상주감리원 추가투입 검토 보고

[강남순환도시고속도로 건설공사 민자사업]

6-1, 6-2, 7-1 3개공구의 감리업무를 담당하는 감리 6공구의 업무편중을   고려하여 2014년 5월 6공구감리를 6공구와 7-1공구로 분할하였으나

6-2공구는 감리원 1명이 담당하는 실정으로 안전 및 품질관리에 어려움이   있어 상주감리원 1명을 추가 투입코자 합니다.

추진경위

○ 2002. 06. 27 : 사업시행자 지정 및 협약서 체결

○ 2002. 07. 12 : 법인설립(강남순환도로(주))

○ 2002. 11. 14 : 민자구간 감리발주

○ 2003. 02. 05 : 감리용역 업체선정

○ 2011. 11. 03 : 청석엔지니어링(주) 계약포기 통보

○ 2011. 12. 02 : 전면책임감리용역 계약변경 제출(강남순환도로(주))

○ 2011. 12. 23 : 청석엔지니어링(주) 계약포기에 따른 감리투입 조정

○ 2012. 11. 30 : 공기연장에 따른 감리투입계획 변경(토목부-30715)

○ 2014. 05. 16 : 감리단 공구분담 변경(토목부-9408)

감리계약 현황

○ 계약형태  : 공동수급분담이행

○ 구 성 원  : 2개사(구성원 계약 지분 : 선진 58%, 도화 42%)

감리 분할	감리5공구 선진ENG		감리6공구 도화ENG						감리71공구 도화ENG			감리7-2공구 선진ENG
공사 내용	시흥 영업소	관악 터널	지하차도	신림 1터널	지 하 차 도	지하차도	신림 2터널	토공	사당 IC교	토공	서초 1터널	서초 2터널	토공	선암교 영업소
공사분할	5공구(39.8%) L=4,900m		6-1공구(11.9%) L=1,320m			6-2공구(17.8%) L=2,439m			7-1공구( 10.2%) L=1,450m			7-2공구(20.3%) L=2,2880m

감리단 조직 변경(현재)

						감리단본부 (선진 1명)
(5공구 선진) 단장 : 1명 시점 : 2명 종점 : 2명				(6공구 도화) 단장 : 1명 6-1공구 : 2명 6-2공구 : 1명						7-1공구(도화) 단장 : 1명 시점 : 1명 종점 : 1명					7-2공구(선진) 단장 : 1명 시점 : 1명 종점 : 1, 강교1

감리단 조직 재편에 따른 감리원 투입계획

구 분	계약당시	공정완화 감축운영 (′12.11~′13.11)	공구분할 (′14. 5~)	추가투입 (′14. 7. 28)	비 고
5공구	7	5	6	6
6-1, 6-2공구	6	4	4	5	증 1
7-1공구	3	1	3	3
7-2공구	6	5	4	3	감 1
계	22	15	17	17

※ 7-2선암교 강교제작이 완료되어 강교감리 1명 철수

○ 조직 재편후 감리투입 현황 비교

구 분	공사비 (억원)	감리비 (억원)	감리비/공사비 (%)	감리원 투입 현황				비고
				수석	감리사	감리사보	계
강남순환(민자)	8,320	132	1.58	3	1	14	17
강남순환4공구	1,807	75	4.15	1	3	3	7
강남순환8공구	2,951	109	3.69	1	2		3
우이신설1공구	1,250	29	2.32	1	1	2	4
우이신설2공구	1,157	28	2.42	1	1	2	4
용마터널	1,170	33	2.82	1	1	2	4

검토내용

○ 감리6공구는 공사6-1, 6-2공구 감리업무에 당초 6명을 투입하였으나공기연장시 공정완화로 2명을 감축, 4명으로 투입을 축소한 상태임.

○ 6-2공구는 최근 낙성대 신봉터널 접속구간 확장 및 터널 내부공사 등 공정이 정상 추진됨에 따라 상주감리원 1명을 추가 투입코자함.

행정사항

○ 상주감리원 추가 투입 승인은 2014. 7.28.부터 승인.

○ 추가투입 감리원의 감리비는 실시협약 제20조(감리)에 의거 민간투자사업 준공시 공사비 감액과 상계 처리(도로계획과 보고 예정). 끝.