문서번호	방재시설부-12085
결재일자	2020.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
김재건		손창익	08/28 박홍봉
협조

「반포천 유역 분리터널 건설공사」

숏크리트 자재 공급원 변경 검토보고

2020.8.

도시기반시설본부

( 방 재 시 설 부)

「반포천 유역 분리터널 건설공사」

숏크리트 자재 공급원 변경 검토보고

기존에 숏크리트를 공급하던 업체의 공사완료에 따른 B/P장 철거로 인해 새로운 공급업체를 선정하기 위해 검토 보고드림

※ 관련문서 : 숏크리트 자재공급 변경 승인 통보 - 방재시설부-3436호(′19.4.1.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 서초구 법원로10 ~ 사평대로240 (미도산 하부)

○ 공사규모 : 유역 분리터널 (▣4.5×4.5~D7.1m, 연장1,162m)

- 터널부 944m (NATM 50m, TBM 894m)

- 유입부BOX 98m, 유출부BOX 120m

○ 공사기간 : '18.2.1.~'22.3.31.

○ 도 급 비 : 38,482백만원

○ 시공사/감리단 : ㈜호반산업 외 1개사/㈜도화엔지니어링 외 2개사

□ 보고내용

○ 기존 숏크리트 납품업체 현황

- 업 체 명 : ㈜대흥ACE건업

- 위    치 : 서초구 강남대로 528(신분당선(용산~강남) 1-2공구)

- 운반거리 : 3.0km

○ 납품업체 변경사유

- 현장 내 B/P 설치가 불가하여 가까운 공사현장(신분당선 1-2공구)으로부터 납품받았으나, 위 현장이 준공함에 따라 B/P 철거 예정으로 숏크리트 공급을 중단하여 새로운 납품업체 물색

○ 변경 사항

공 종	설 계(계약)	당 초(현재)	변 경
터널공	- 숏크리트(생산,운반,타설) =2,505㎥ - 배치플랜트 설치 및 철거 :1기	- 숏크리트 구매(현장도착도) =1,466㎥ - 인근 BP장 운영하는 현장에 숏크리트 구매조달	- 숏크리트 구매(현장도착도) =1,039㎥ (잔여분) - 인근 BP장 운영하는 현장에 숏크리트 구매조달 가능확인 완료

구 분	우원개발(주)	중합중기	백두종합중기
생산현장	신림-봉천터널 1공구	별내선 복선전철 5공구	진접선 차량기지 1공구
위치	관악구 신림동 1569-9	남양주시 다산순환로 125	남양주시 오남읍 양지리 7-4
운반거리	L=8.53km	L=18.52km	L=29.59km
공급단가	일 반 : 234,480 원/m3 강섬유 : 284,480 원/m3	일 반 : 250,000 원/m3 강섬유 : 330,000 원/m3	일 반 : 260,000 원/m3 강섬유 : 360,000 원/m3
철거기간	2023년	2020년 8월	2022년
선정	◎

○ 신규 납품업체 비교 검토

구 분	규격	단위	당초	변경	증.감	비고
- 숏크리트공
숏크리트공	생산, 운반, 타설	M3	2,446		-2,446
숏크리트공	갱내운반, 타설	M3		2,446	2,446
- 부대공
숏크리트용 배치플랜트 설치	60m3/hr	기	1		-1
숏크리트용 배치플랜트 철거	60m3/hr	기	1		-1
- 자재운반비
시멘트 운반	벌크	TON	1,220.031		-1,220.031
사급자재		M
시멘트		개소	1,220.031		-1,220.031
모래		개소	1,784		-1,784
골재	D10mm	M	874		-874
숏크리트 (구매)	일반	M3		71	71
숏크리트 (구매)	강섬유	M3		2,434	2,434

○ 수량 증·감 검토

○ 공사비 증·감 검토

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총 사 업 비		1,125,837	1,106,094	-19,743
총 공 사 비	도급비	971,773	1,106,094	134,321
	관급비	-	-	-
B/P장 부지 임대료		154,064	-	-154,064	설계누락 (예상금액)

(단위 : 천원)

- 금회 반영분(TBM 504m)에는 기 실정보고 시 누락된 갱내 숏크리트 운반비 반영

- 신규 단가 낙찰률(87.595%) 적용

□ 건설사업관리자 의견

○ 기 숏크리트 납품업체의 B/P장 철거로 운반거리 및 경제성이 우수하며 적기에 공급이 가능한 인근 B/P장(신림-봉천터널 1공구)으로 공급원을 변경하는 것이 타당

□ 조치계획

○ 건설사업관리기술자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 위 실정보고 사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 반영하고자 함

붙임 : 건설사업관리기술자 실정보고 1부.  끝.