문서번호	토목부-14045
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	토목부장	시설국장
이석근	신복민	노우성	07/22 이광세

준공기한 연기보고

[도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치 실시설계용역]

2014.  7. 21.

도시기반시설본부

토 목 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

준 공 기 한   연 기 보 고

[도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치 실시설계용역]

용역개요

○ 용역명 : 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치 실시설계용역

○ 위  치 : 중랑구 묵동IC 내

○ 규  모

․ 진입램프 : 폭 5m, 연장 638m

․ 진출램프 : 노선 미확정

○ 용역기간 : 2012. 12. 28 ~ 2013. 8. 31

○ 용역비 : 666,600천원(계약 547,000천원)

○ 용역사 : ㈜선진엔지니어링, ㈜경원엔지니어링

용역기간 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경
용역기간	2012.12.28 ~ 2013. 8.31.	2012.12.28. ~ 2014.12.31.
도 급 비	547,000,000원	547,000,000원

연기사유

○ 진입램프 노선변경으로 기본 및 실시설계 신규 추진에 따른 관계기관

재협의 및 주민공람공고 등으로 과업기간 추가소요

○ 부시장 지시에 따른 진출램프 재검토 및 추가검토 등으로 과업기간

과업기간 추가소요(진출램프 시행여부 미확정-도로계획과)

조치의견

○ 현재 묵동IC내 진입램프에 대하여는 기본설계완료되어 중간 자문회의

건설기술심의 준비중이며 디자인심의 상정(2014. 7.15.)하여 심의예정임.

○ 묵동IC 내 진출램프 설계추진이 시행되지 않을 시 2014년도 배정된        도시고속도로 연결램프 포괄예산(45억원)중 묵동IC 예산(21억원)으로

금년도 하반기 공사발주 예정임.

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.