함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	시설과장
(경유)
제 목	물품변경계약체결통보 (강북정수센터 고도정수처리시설공사 입상활성탄 구매 및 포설 3차)

1. 시설과-3468(2014.07.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『강북정수센터 고도정수처리시설 입상활성탄 구매 및 포설 3차분』에 대한 변경계약을 별첨과 같이 체결하였으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약자 : 신광화학공업(주),자연과학산업(주)

나. 용역기간 : 기간연장

전체분 2013.06.28.~2014.07.20.

변경 전체분 2013.06.28.~2014.09.30.

3차분  2014.03.11.~2014.07.20.

변경 3차분 2014.03.11.~2014.09.30.

다. 계약금액 (변경없음)

*****************************************

****************************************

************************

- 시운전 과정에서 역세척으로 인한 활성탄 유실이 발생할 것으로 예상되므로 계약기간을 연기하여 계약자로 하여금 보충토록 하고자 함.

3. 계약보증금 : 보험보증증권 기간연장

붙임 :  1. 물품변경계약서1부.

	재무회계과장
주무관	김미정		재무회계과장	07/23 채규평
협조자
시행	재무회계과-9618	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1233	/전송	02)3146-1209	/		/	부분공개(7)