함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(전기설비보수공사-연간단가)

1. 정수시설과-90(2014.3.20)호 관련「전기설비보수공사(연간단가)」시행중 발생한 공사물량            증․감분에 대하여 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 전기설비보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 04. 7 ～ 2014. 12. 20

다. 도 급 자 : (주) 용 우  대표 김 헌영

라. 설계변경 내역                                             (단위:원)

당초금액			변경금액			증.감액
합 계	정수비	원수비	합 계	정수장	취수장
64,626,800	55,759,850	8,866,950	64,096,000	52,183,300 (감:3,576,550)	11,912,700 (증:3,045,750)	(감) 530,800

바. 예산과목

○ 정수장 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

○ 취수장 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비,기타교체비

사. 설계변경 금액으로 변경계약 하고자 함.

첨부 : 1. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경내역서 1부 .

주무관	양영민		주무관	하수용		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	07/23 박기석
협조자	행정관리과장	임건혁
시행	정수시설과-1412	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개