투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	SH공사사장
(경유)	SH공사 주택사업본부 공사2처 전기통신2팀
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 변경요청 승인알림-신내3지구(신호)

1. 교통관리과-11859호(2014.05.01.), 교통관리과-16105호(2014.06.13.) 및 전기통신2팀-2581호(2014.07.16.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 교통안전시설물 원인자 부담공사 변경요청을 아래와 같이 승인 하오니 「교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항」에 알맞게 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신내3지구 국민임대주택단지조성 전기 및

교통신호기공사(신호)

나. 공사위치 : 서울시 중랑구 신내동 신내3지구 국민임대주택단지

조성사업지 주변도로

다. 변경 승인조건 및 변경사유

규제번호	변경 승인조건
교통관리과-11859	규제 내용에 맞게 실시설계대로 시공
교통관리과-16105	새우재고개 지주Φ200*8m 밴드형 부착대 추가 하여 이설 시공을 → 지주Φ250*8m 양날개 부착대형 지주로 교체하고 실시설계 변경하여 시공 (감리원 검토의견서)

※교통신호공사시 관련 교통안전표지 및 노면표시공사 완료후 신호등 점등

라. 관련업체 현황 및 공사기간

구분	공사기간		설계	감리	시공	원인자
	변경전	변경후
신호	2013.09.12.~2013.12.13	2013.09.12.~2014.08.15	도로교통공단	대영유비텍(주)	에스엠종합개발(주)	SH공사

붙    임 : 1. 규제내용 및 실시설계도면 2부

2. 감리원 설계검토서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	차준원		기전과장	07/23 최주용
협조자
시행	기전과-5177	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개