문서번호	생태공원과-1728
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태공원과장	공원부장
임이환	이해룡	전결 07/23 代이경수
협 조
	주무관		서은교

관급자재(CCTV) 구매ㆍ설치 계획

2014.07

공 원 부

(생태공원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『영화한강공원 친수공간 조성 전기공사』

관급자재(CCTV) 구매ㆍ설치 계획

우리과에서 추진중인 양화한강공원 친수공간 조성공사에 CCTV 설치하여 각종 범죄와 사고예방 및 안전하고 행복한 놀이공간이 되도록 상시모니터링 시스템을 구축하여 이용시민의 편익증진에 기여코자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 양화한강공원 친수공간 조성 전기공사

□ 위    치 : 영등포구 양화한강공원(성산대교 남단하류)                □ 사업규모 : 면적 28,000㎡(연장 2.17㎞)

□ 사업기간 : ‘13.12 ~ ’14.12.31

□ 총사업비 : 5,500백만원(토목포함)

□ 주요내용 : 물놀이장 1,700㎡, 자연형 호안 240m, 산책로 270m

주차장 15,300㎡, 실개천 및 생태습지 1개소 등

Ⅱ		구 매 개 요

□ 건        명 : CCTV 구매ㆍ설치

□ 용        도 : 양화한강공원 친수공간(물놀이장)

□ 계 약  방 법 : 조달청 구매(총액계약)

□ 납 품  기 한 : ‘14.11.31

□ 납 품  조 건 : 현장설치도(시운전 포함)

□ 검사(시험)방법 : 공사감독관 입회시험 및 공인검사기관 시험의뢰

□ 납 품  장 소 : 양화한강공원 친수공간 조성공사 현장

□ 소 요  예 산 :  45,790,000원(조달수수료 포함)

□ 하 자  기 간 : 남품검사일로부터 2년간

□ 유 지  관 리 : 양화한강공원 친수공간 조성공사 완료 후 물놀이장

운영계획(위탁운영 등)에 따라 활용코자 하며

CCTV는 총무부 총무과에서 유지관리.

Ⅲ		추 진 경 과

□ ‘11.03~07   : 양화한강공원 친수공간(물놀이장) 조성 설계용역 완료

□ ‘13.04~11  : 양화한강공원 친수공간(물놀이장) 조성 설계

□ ‘13.12.31   : 전기공사계약

□ ‘14.04.07   : 하천점용 변경허가(친수공간 추가)

Ⅳ		향 후 계 획

□ ‘14.07.24  : 조달발주(품의서 작성)

□ ‘14.08~11 : 자재납품 및 설치

□ ‘14.11~12 : 시운전 및 각종 검수(시험) 실시. 대금지급

붙임 : 1. 양화한강공원 친수공간 조성 발주계획 검토보고 1부

2. CCTV 내역서 1부. 끝.