문서번호	도로보수과-3381
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최영서		국중진	07/23 정진오
협조

설계변경(1차) 검토 보고

(2014년 도로손상부분 긴급복구공사-연간단가)

2014. 7.

성동도로사업소

(도로보수과)

설계변경(1차) 검토 보고

공종별 물량을 추정하였으나 현재까지 실질 공사 수량을 반영하고 하반기 왕산로 중앙버스전용차로 정차대 정비공사를 위해 신규 공종 추가 및 예산 추가 재배정에 따른 도급비 증 검토

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

○ 규    모

- 절삭후덧씌우기(t=5~20cm) 208a     - 소규모 인력포장(t=5~20cm) 65a

- 부대공 1식

○ 계약금액 : 금659,137,400원

○ 계 약 자 : 한국건설기술교육원(주) 대표 장영환

○ 공사기간 : 2014. 3. 27. ~ 2015. 2. 28.

○ 공 정 률 : 50%

□ 보고내용

○ 긴급복구공사 예산 하반기 추가 재배정으로 공종별 물량 증(도급비 증)

- 관련근거 : 도로관리과-(2014.7.17.)호

- 재배정내용

총 재배정액	상반기 재배정	금회(하반기) 재배정	비고
1,950	1,500	450	단위 : 백만원

○ 손상이 심한 중앙버스전용차로 정비 예정 물량 반영(공종 추가)

- 대  상 : 왕산로 중앙버스차로정류장 8개소   - 규 모 : t=20cm, A=24a

□ 변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
절삭후덧씌우기	t=5~20cm	a	208	412	증 204
소규모 인력포장	t=5~10cm	a	65	110	증 45a

○ 도급비 변경

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	659,137,400	1,020,591,000	증 361,453,600
포장공	366,396,231	611,348,466	증 244,952,235
부대공	69,805,950	71,823,840	증 2,017,890
제경비	222,935,219	337,418,694	증 114,483,475

□ 향후계획

○ 2014. 7. 30. : 7차 작업지시(소규모 인력포장 100개소 15a)

○ 2014. 8. 15. : 8차 작업지시(절삭후덧씌우기 8개소 24a)

첨  부 : 1. 변경내역서 1부

2. 제비율검증결과 1부.  끝.