다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	지체상금 면제 요청(토피어리 화단 설치)

1. 총무과-10889(2014.4.19)호와 관련입니다.

2. ‘토피어리 화단 설치’와 관련하여 아래와 같이 지체상금 면제를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 토피어리 화단 설치

나. 계약업체 : ㈜일진글로벌 (대표:조병상, 인천광역시 서구 탁옥로 37)

다. 계약금액 : 금11,400,000원(금일천일백사십만원)

라. 계약일자 : ’14.4.22

마. 납품기한 : ’14.5.31

바. 준공검사원 제출일 : ’14.7.22

사. 지체기간 : ’14.6.1 ~ 7.22 (52일간)

아. 면제사유 : 위 계약건은 계약자가 기한내 준공(철거)이 가능하였으나, 시민 이용도 증가에 따른 우리 부서 요청으로 준공 검사원 제출이 다소 지연된 바, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제90조의 지체상금을 면제토록 선처바랍니다.  끝.

	총무과장
주무관	석명오		시설관리팀장	최석기		총무과장	07/23 이혜경
협조자
시행	총무과-19647	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 세종대로110	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5668	/전송	02-2133-0771	/		/	대시민공개