투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	북단램프구간 우선시공 지시

□ 문서번호 : SMIH-14-32950

□ 작성일자 : 2014-07-23 11:07:49

1. 20140. 7.22 개최한 기술자문회의와 관련하여 북단IC 일대 D램프 P2, C램프 기보강 구간에 대한 보완설계도서를 송부하오니 시공이 가능한 구간에 대하여 Fast Track방식으로 우선 시공토록 조치하시기 바랍니다.

가. 아울러 감리단은 보완설계도서에 대하여 기술지원감리원등의 검토를 실시하여 2014. 7. 31 까지 실정보고하여 주시기 바랍니다.

2. 월드컵감리 제2014-235(2014.7.21.)호로 제출한 하계휴가에 대하여 승인하니 대직자 근무, 업무인수인계등 감리업무 수행에 철저히 기하기 바랍니다.

3. 아래 미결사항에 대하여 조속히 검토하여 기한내 제출하시기 바랍니다.

가. 지장상수도 이설 추가 실정보고 : 2014. 7. 25

나. 매립폐기물 처리 방안 : 2014. 7. 31

다. 6차분 공정추진 및 예산집행 계획 : 2014. 7. 25

라. 난지물재생센터에서 요청한 휀스설치 계획 : 2014. 7. 25

붙임 : 보완설계도서 1부.  끝.

주무관							최진우			토목총괄과장					07/23 김영수
협조자
시행			토목부-14206									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 별관2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2542						/전송			02-3708-2599					/	cjw1116@seoul.go.kr												/	대시민공개