투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기에 따른 재계약 의뢰

1. 우리부에서 시행중인 「도시고속도로 연결램프(화랑로 진․출입)설치 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 과업기간이 연장되어 재계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 도시고속도로 연결램프(화랑로 진․출입)설치 실시설계용역

나. 계약금액 : 547,000,000원(변경없음)

다. 계약자 : ㈜선진엔지니어링 대표 함인선외 2개사

라.준공기한

- 당초 : 2012.12.28. ~ 2014. 8.31

- 변경 : 2012.12.28. ~ 2014.12.31

마. 예산과목 : 도시개발특별회계, 도시기반시설본부, 도로건설, 도시고속

도로망확충(도시개발특별회계), 도시고속도로 연결램프

추가설치

붙임 : 1)준공기한 연기보고서 1부.

2)준공기한 연기의뢰서 1부.

3)합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		주무관	신복민		토목부장	07/23 노우성
협조자
시행	토목부-14209	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개