문서번호	급수설비과-4557
보존기간	년
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김인환	07/23 이상홍
협 조

급수공사 감독대행 주간실적 보고

2014. 7. 23

상수도사업본부

(급수설비과)

급수공사 감독대행 주간실적 보고

상수도공사 시공감독업무 위탁과 관련하여 급수공사 감독대행 주간실적을  검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ. 시공감독 위탁현황

□ 위탁개요

○ 위탁대상

- 급수공사 및 인입관 철거 ․ 폐쇄(포장복구 포함) : 39,000건

- 긴급 누수복구공사(포장복구 포함)              : 49,000건

○ 위탁기간 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 5. 24

○ 계약금액 : 9,131,891,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, (주)건양엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 31명 (급수공사)

- 상주 : 28명(중급 8명, 초급 20명), 비상주 3명

Ⅱ. 검토회의 및 주간실적

□ 검토회의

○ 일   시 : 2014. 7. 21 (월) 14:00~14:40

○ 장   소 : 급수부 회의실

○ 참 석 자 : 4명 ( 급수설비과장, 기술지원감독대행자 비상주 3명)

○ 회의내용 : 주간실적 검토 및 지시사항 전달

□ 추진 실적

○ 급수공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 07. 07 ~ 07. 13.

구 분		감독대행			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		322	315	7	97.80	1,135	7
누계	’14.1.1이후	8,021	7,970	51	99.40	25,343	222
	’13.5.25이후	20,773	20,535	238	98.90	68,746	556

- 시정조치 : 안전 3건, 토공 3건, 기타 1건.

○ 포장복구공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 07. 07 ~ 07. 13.

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	273	254	93.00	87	87	100	186	167	89.80
누 계	5,673	5,054	89.10	1,722	1,704	99.0	3,951	3,350	84.80

○ 상주감독대행자 상호 업무지원

- 기 간 : 2014. 07. 07 ~ 07. 13.

구 분	계			사업소 내			사업소간
	계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구
금주(회)	21	11	10	17	7	10	4	4	-
누계(회)	322	221	101	276	175	101	46	46	-

○ 사업소 순회 지도감독(기술지원감독대행자)

- 기 간 : 2014. 07. 14 ~ 2014. 07. 18.

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지도감독 (건)	급수	25	1	3	2	-	2	-	2	3
	포장기타		-	-	-	6	-	6	-	-
시정조치(건)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 시정 조치 : 없 음.

□ 지시사항

○ 하절기 안전사고 예방 철저

- 근로자들이 안전장비를 갖추고 근무하도록 할 것

- 미포장으로 인한 사고 및 민원 발생이 없도록 점검 할 것

- 단수시 사전안내 철저

○ 6월말 신규 급수공사 업체에 대한 자재 관련 교육 및 사용승인 시행

○ 굴착전 도시가스 등 유관기관 협의여부 확인

○ 보도 공사전 안전 및 품질관리 철저 (기 공문 지시사항)

따로붙임 : 위탁감독대행 주간실적 각 1부. 끝.