문서번호	시설관리과-2109
결재일자	2014.7.24.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설부장		한강사업본부장
유충현	유충현	차광재		07/24 한국영
협 조
	주무관		오상협

공사시행에 따른 뚝섬주변 주민요청에 의한

공사설명회 추가개최 결과 보고 (2차)

2014. 7

시 설 부

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

공사시행에 따른 뚝섬주변 주민요청에 의한

공사설명회 추가개최 결과 보고(2차)

뚝섬공원 도로확장공사전 주민설명회를 개최(‘14.5.9)하였으나, 추가 설명회 요청이 있어 트라펠리스 등 인근주민들의 의견청취를 위해 2차 공사설명회 개최후 결과 및 향후계획 보고임 (주차장 이전 및 교통정체 해소후 시행 : 절대 반대)

Ⅰ		개 요

❍ 개최일시 : 2014. 7. 3(목) 19:00 ~ 16:00

❍ 참 석 자(25명) : 트라펠리스주민 자치회장 및 인근 주민 등 25명

- 시설관리과 : 담당 유충현 등 5명

❍ 장    소 : 트라펠리스 주민자치회의실

Ⅱ		회의내용

주요 주민의견

❏ 특화사업 당시 접근성 개선을 위한 교통영향 평가를 실시하여 반영하였으나, 차량정체 및 불법주차 문제 미해결 신뢰저하

▸ 현재도 휴일 및 성수기에는 공원 안밖으로 이용객들 차량증가로 주민 불편이 극심한데 도로확장으로 양방향 통행 절대 반대

▸ 당초 추진에 따른 연명부(1,500명)는 아리랑하우스측 주차장 확보 민원으로서 주민의견(주차정체 해소)은 고려되지 않았으므로 공사절대 불가

❏ 근본적인 문제해결을 위해서는 2개 주차장에 대해 대체부지를 확보하여 이전요구

▸노유나들목앞과 청담대교 하부주차장 2개소에 대해 대체 부지를 확보하여 이전요구

▸용역 등을 통해 뚝섬주변 교통개선 해소를 전반적으로 재검토 선행 기존 주차장 확대는 의미가 없으므로 주차 차량 구역확대는 불가

주요 답변내용

❏ 노유나들목~뚝섬안내센터까지 도로확장공사는 차량유입을 유도하는 공사가 아니라 공원내 주민편의(분산) 및 성수기 차량 지 ․ 정체를 최소화하는 교통개선 공사임

☞ 회전교차로 1개소, 매표소 2개소 이전설치, 주차장이용 차량에 대한 전용차선 설치 등 성수기(수영장 개장)오도가도 못하는 차량 분산효과 기여

☞ 양방향 통행을 위해 확보하는 도로(1차로)는 설치후 효과 없을시 보도활용

☞ 향후 제내 ․ 외지를 아우르는 교통영향평가 용역을 검토토록 하겠음

❏ 반대하지 않는 자전거도로 이전구간에 대한 녹지조성 및 안전시설공사는 성수기(7~9월)이후 공사 조속시행

☞ 금번 공사에는 주차장 이전 관련예산은 없으며, 주차장 설치시 특화사업으로 조성된 녹지 및 시설물(수변무대 등)훼손과 특정기업(아리랑하우스)을 위한 주차장 설치라는 오해소지가 있는 등 향후 관련부서(공원부)와 협의하여 장기적으로 검토하겠음

Ⅲ		조치의견

❍ 참석한 주민의 절대요구 사항인 도로이용 변경 불가(일방통행 → 양방향통행)는 주민의견 수렴후 재검토(공사제외)하고 교통개선(주차장 매표소 이전 등)공사는 공사전 다시한번 이해설득(박래학 시의원 협조)

❍ 아울러 향후 교통개선관련 공사(회전교차로, 양방향시설, 도로확장 등)가 최종주민의견 수렴후 불가 판정시 감액되는 공사비(5.5억원)에 대해서는 자전거도로 이전공사에서 제외된 일부 공정(추가 안전난간설치 및 자전거 도로포장공사 : 2억원)시행 및 타절준공(감 3.5억원) 등을 검토하겠음

Ⅳ		향후계획

❍ ‘14.7 ~ ’14.9 : 성수기간 공사제외

❍ ‘14.7.17 ~ ’14.8.10 : 지역주민 의견수렴(첨부양식)

❍ ‘14.10 ~ ’14.12 : 자전거도로 이전구간 녹지조성 등 공사시행

❍ ‘15.3 ~ ’15.10 : 뚝섬주변 교통개선 용역 시행

붙임  1. 주민설명회 개최의견(요약) 1부.

2. 참석현황(사진) 1부.

3. 주민의견서 징구(양식) 1부.  끝.