문서번호	시설보수과-5998
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	07/24 조병준
협조

현장 실정보고(아스팔트포장 물량 조정 및 관급자재 추가 구매요청)

〈화곡터널외 2개소 보수공사〉

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

현장 실정보고 사항 검토 보고

『화곡터널외 2개소 보수공사』시행중 "아스팔트포장 물량 조정 및 관급자재 추가 구매"에 따른 현장 실정보고 사항이 접수되어 이를 검토하고 보고드림.

▶ 관련문서 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독1처-6268호(2014. 7.17)

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 화곡터널외 2개소 보수공사

공사기간 : 2014. 5.13 ~ 2015. 1. 7

공사개요 : 포장 88.9a, 신축이음 233.9m, 단면보수 417.3㎡

도 급 액 : 477,826천원

도 급 자 : ㈜신현공사  유기환

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항 및 검토의견

【화곡터널 아스콘포장 물량 조정】

현황 및 문제점

○ 당초 화곡터널의 아스팔트포장은 두께 t=5㎝ 평삭 후 덧씌우기로 설계되어 있으나

○ 현장 조사결과 기존 아스팔트포장 두께가 t=5.0~6.0㎝로 포장두께가 일정하지 않아 두께 t=5㎝ 평삭 시공시 잔존 아스콘의 탈락으로 아스팔트 재포장 후 균열 및 밀림현상 등 하자의 우려가 있음

○ 또한 화곡터널 아스팔트포장 면적과 현장 실측결과 포장 폭 및 연장이 일부 차이가 있어 조정이 필요한 실정임.

화곡터널 아스팔트 덧씌우기 물량 실측

구분	위 치	폭(B)	연장(L)	평균깊이(t)	비고
당초	화곡터널(화곡역→까치산역)	7.5m	415.0m	5.0㎝
	화곡터널(까치산역→화곡역)	7.5m	442.0m	5.0㎝
실측	화곡터널(화곡역→까치산역)	6.8m	423.6m	5.3㎝	두께산출 참조
	화곡터널(까치산역→화곡역)	6.8m	449.8m	5.2㎝

※ 현장 실측도면

화곡터널 아스팔트 덧씌우기 물량 증·감

○ 아스팔트 덧씌우기 수량 증․감

- 물      량 : 64.20a(당초)⇒59.39a(변경)【면적(A)=4.81a(감)】

- 개략공사비 : 2,794천원(감)

○ 관급자재(아스콘) 수량 증․감

- 물    량 : 755ton(당초)⇒745ton(변경)【10ton(감)】

- 자 재 비 : 730천원(감)

검토의견

○ 상기와 같이 기존 아스팔트 두께와 동일하게 신규 포장 두께를 기존과 같이 t=5.0~6.0㎝로 조정하여 아스팔트 균열 및 밀림현상을 미연에 방지하고,

○ 현장 조사결과에 따라 평삭 후 아스팔트 덧씌우기 면적을 조정하고자 함.

【공항입구지하차도 포장면적 조정】

현황 및 문제점

○ 당초 공항지하차도 아스팔트포장 면적이 현장 실측결과 포장 폭 및 연장이 상이하여 조정이 필요한 실정임.

공항입구지하차도 아스팔트 덧씌우기 물량 실측

구분	위 치	폭(B)	연장(L)	평균깊이(t)	비고
당초	공항지하차도(신월IC→김포)	7.20m	210.0m	5.0㎝
	공항지하차도(김포→신월IC)	7.20m	105.0m	5.0㎝
실측	공항지하차도(신월IC→김포)	7.75m	214.7m	5.0㎝
	공항지하차도(김포→신월IC)	7.46m	133.6m	5.0㎝

※ 현장 실측도면

공항입구지하차도 아스팔트 덧씌우기 물량 증·감

○ 아스팔트 덧씌우기 수량 증․감

- 물      량 : 22.60a(당초)⇒26.22a(변경)【면적(A)=3.62a(증)】

- 개략공사비 : 2,728천원(증)

○ 관급자재(아스콘) 수량 증․감

- 물    량 : 267ton(당초)⇒314ton(변경)【47ton(증)】

- 자 재 비 : 3,420천원(증)

검토의견

○ 상기와 같이 신규 아스팔트 포장에 대해 현장 실측결과에 따라 아스팔트포장 면적을 조정하고자 함.

【관급자재(아스콘) 추가 구매】

현황 및 문제점

○ 화곡터널 및 공항입구지하차도 아스팔트포장 면적 상이로 인한 관급자재(아스콘) 추가 구매가 필요한 실정임.

관급자재(아스콘) 물량 산출

구 분	당 초		변 경		아스콘 수량 증․감
	포장면적(a)	아스콘(ton)	포장면적(a)	아스콘(ton)
화곡터널	64.20	755	59.39	738	감) 10ton
공항입구 지하차도	22.60	267	26.22	321	증) 47ton
양화교	2.10	30	2.10	30	-
계		1,052		1,089	증) 37ton

검토의견

○ 상기와 같이 현장 실측결과에 따라 아스팔트포장 면적을 조정하고, 관급자재인 아스콘을 추가 구매(37ton)하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅲ		처 리 의 견

시설관리공단의 실정보고 사항에 대하여 승인 처리코자 하며 공사비 변동사항(증액)은 추후 설계변경시 정산 처리코자 함.

붙  임  1. 현장 실정보고서 각 1부(시설관리공단).

2. 공사비 증감내역서 각 1부

3. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.