문서번호	시설관리과-17794
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		소장
강무진	이철구	이시우		07/24 정운진
협 조

『용마배수지 항내부 구조물 보수,보강공사』

추진계획 보고

『용마배수지 항내부 구조물 보수,보강공사』

추진계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 중랑구 면목동 “용마(대)배수지”에 대하여 콘크리트 구조물 노후(균열 및 녹물유출)가 발생되어 구조물 보수 및 내구성 증진을 위한 “용마배수지 구조물 보수ㆍ보강공사”를 시행하여 중랑,동대문구 26개동 25만여 주민의 안정적인 “수위운영” 및 “시민급수” 업무에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ   사업목적 및 관련근거

□ 콘크리트 구조물 노후에 따른 균열발생 및 철근노출에 따른 녹물유출이       발생되어 구조물 보수 및 노후화 차단에 따른 구조물 건전성 확보

□ 관련근거

-용역명: 용마배수지외1개소 정밀안전진단 용역

-용역기간:2013.3.13.~8.17

-용역사: 대한산업안전협회 대표 신진규

※ 붙임 용마배수지 정밀안전진단 요약보고서 참조

Ⅱ    구조물(용마배수지) 현황

□ 위 치 : 중랑구 면목동 산 1-4(용마폭포공원내)

□ 현 황

용량(㎥)	소재지	규 격	표 고(m)		급수현황		설치 년도
			HWL	LWL	급수 구역	공급량 (천㎥/일)
80,000	중랑 면목동 산1-4	(62.5×61.7×6) ×4개항	75.1	69.1	26개동 255,800 세대	179	2002. 12

Ⅲ  보수계획(용역결과)

□ 보수현황

보수공종	단위	계	1지	2지	3지	4지
단면복구	㎡	18.6	17.8	0.7	-
철근노출 단면복구	㎡	169.6	85.2	27.8	27.3	29.5
균열보수	m	861.1	415.4	206.8	123.4	115.5
표면보수	㎡	1636.6	72.2	317.5	53.1	1148.6
예상 공사비	천원	490,000	154,000	106,000	65,000	165,000

□ 정비계획

- 현재 우리사업소 사업금액이 300,000천원으로, 전체에 대한 공사            발주는 어려운 실정으로 금년(2014년)에는 예산금액 범위내에서             보강공사 시행 가능한(1지,2지) 구간에 대해 발주 시행하여 하반기           배수지 항청소 이전(11월) 준공시행 하고

- 잔여구간(3,4지)에 대하여는 「2015년 예산(안) 편성자료」 작성 및            제출 하여, 향후(2015년 발주) 공사 시행코자 합니다

사업개요(발주계획)

□ 공 사 명 : 용마배수지 항내부(1,2지) 보수ㆍ보강공사

□ 사업기간 : 착공일로부터 120일

□ 총사업비 : 300,000천원

-본부(재무회계과) 계약심사 결과에 따라 도급비 변경

□ 계약방법 : 공개경쟁입찰

□ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,배급수비,수선유지교체비(22202-기타교체비)

Ⅳ  세부추진 내역

□ 계약심사 및 발주 ; 8월

- 금액 5억이하 본부(재무회계과) 심사요청

□ 계약 및 착공 ; 9월

□ 공사시행 및 준공 ; 10~11월

- 하반기(10~11월) 배수지 항청소 병행시행

따로붙임 : 1. 정밀안전진단 결과표

2. 용마배수지 점검사진 각1부

3. 보수물량 산출표 1부..  끝.