투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	국토교통부장관(광역도시철도과장)
(경유)
제목	예산 추가배정 협조요청(서울지하철9호선1단계 사업)

1. 서울지하철9호선1단계사업 예산(국비 40%, 지방비 60%)으로 우리 서울시(도시기반시설본부)에서 한국철도시설공단에 위탁 시행중에 있는 노량진역 환승통로건설 토목공사와 관련입니다.

2. 노량진역 환승통로는 서울지하철9호선 1단계 사업으로 시행 완료하여 운행중에 있는 노량진역과 국철1호선 노량진역을 연계하는 공사로,

3.당초 코레일에서 추진 하였던 노량진 민자역사 사업과 연계하여  공사 추진중 민자역사 사업이 취소되어 현재의 노량진역 승강장에 맞추어 재설계를 실시하고 ’14년 12월 완료 목표로 공사를 추진중에 있습니다.

4. 민자역사사업 취소에 따른 공사기간이 장기화 되고 예측하지 못한 지장물 이설비용이 추가되어 한국철도시설공단으로부터 공사비 추가 확보 요청이 있고, 추가로 확보해 주지 않을 경우 공사를 중지 하겠다는 통보가 있어  불가피하게 예산(445백만원) 배정을 요청 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

○ 사 업 명 : 노량진역 환승통로건설 토목공사

○ 사업기간 : ‘09.12 ~ ’14.12

○ 공사규모

- 주환승통로 B=8.0m,  L=60m, 계단 4개소

- 편의시설  E/V 4개소,  E/S 2개소

○ 발 주 처 : 한국철도시설공단(수탁공사 시행)

○ 공정율(‘14.7월 현재) : 81%

가. 추가사업비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
계	16,189	17,301	1,112
국 비	6,475	6,920	445	추가요구
지방비	9,714	10,381	667	서울시 부담

. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황왕연		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	07/24 代김성호
협조자	주무관	최경준
시행	도시철도토목부-8114	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청남산별관4층	/
전화	02)772-7210	/전송	02)772-7306	/	hwy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개