투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	방화 빗물펌프장 증설공사 추가공사 업무지시

1. 귀 공단(사)의 발전을 기원합니다.

2. 우리본부 시설공사인 「염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사」와 관련하여 방화 빗물펌프장 내 유휴 공간을 활용하여 관리동을 신축하여 줄 것을 강서구청에서 요구하여 옴에 따라 이에 대해 도급사로 하여금 실행(설계 및 시공)하고자 업무지시하니 도급사는 붙임 계획 평면도를 참고하여 건설기술진흥법에 따라 실시설계를 진행하여 주시고 공단은 실시설계 결과에 따라 공사가 진행될 수 있도록 위탁감독 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 관리동 신축공사를 올해 안에 마무리 할 예정이므로 실행은 선시행 후 설계변경하고자 하며 실시설계에 대한 설계감독은 우리본부에서 할 예정이오니 이점 참고하시고 실시설계 후 내역에 대한 계약은 엔지니어링사업대가의 기준 및 공사계약일반조건에 따라 진행할 예정임을 알려드립니다.

붙임 : 1. 방화 빗물펌프장 관리동 신축 계획 평면도 1부.

2. 개략 공사 내역 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,홍용종합건설(주) 대표 이춘택
★주무관	조동협		방재시설과장	서관석		방재시설부장	07/24 임춘근
협조자
시행	방재시설부-6696	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개