문서번호	건축부-9150
결재일자	2014.7.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정재흥		代이형재	07/24 김우성
협조

『시립노원시각장애인 복지관 재건축공사』

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.07.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」의 시공감리원으로부터 제출된 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 지적사항에 대한 조치결과 보고

1		검토근거

○ 건축부-9088호(‘14.07.23) : 설계변경자문 소위원회 자문(결정)내용 알림

○ 전인(노원)14-141호(‘14.07.23) : 설계변경 자문(결정)사항 조치결과 보고 제출

2		검토보고 내용

○ 검토보고 사유

- 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 관급자재 사급전환으로 인한 물량증가는        신규품목 및 비목단가 적용 검토 등 지적사항에 대한 조치결과 보고서가 시공감리원        으로부터 제출됨

○ 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 조치 내역 : 별첨

3		감리원 검토의견

○ 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사의 설계변경 자문회의 결정사항을 수용,       당초 자문 요청금액에서 2,168,120원을 감액 조치함

○ 공사비 검토결과(직접비)

- 설계변경자문 요청 금액 : 225,327,375원

- 설계변경자문 지적사항 보완 금액 : 223,159,255원

- 증감액 : 감 2,168,120원(※폐기물 처리용역비는 증감없음)

4		처리의견

○ 시공감리원의 검토의견과 같이 설계변경 자문(결정)결과 지적사항 조치이행 등

보고사항이 적정하므로 동 내용을 승인처리하고, 향후 설계변경토록 감리원       에게 통보하고자 함

첨부 감리검토 보고서류 1부.  끝.