투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제 목	폐기물처리용역 준공기한 연기 의뢰(신림2 빗물펌프장)

우리부에서 시행 중인『신림2 빗물펌프장 설치공사 건설폐기물처리용역』과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사 건설폐기물처리용역(총차)

나. 용역개요 : 폐기물 처리 및 운반

다. 용역금액 : 109,654천원

라. 용역기간 : 2013.03.19 ~ 2014.12.31

마. 용역업체 : 지준, (주)진흥준공업

바. 준공기한 연기내용 :

구 분	도급금액 (천원)	공 사 기 간		비 고
		당 초	변 경
총차	109,654	2013.03.19 ~ 2014.07.30	2013.03.19 ~ 2014.12.31	증153일

사. 준공기한 연기사유 : 공사기한 연기에 따른 폐기물처리용역 연기

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 1. 준공기간 연기 의뢰서 1 부.

2. 합의 각서 1 부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이정국		방재시설과장	서관석		계약2팀장	홍연화		방재시설부장	07/24 임춘근
협조자
시행	방재시설부-6682	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 3층	/
전화	3708-8690	/전송	3708-2599	/	jung55g@seoul.go.kr	/	대시민공개