문서번호	건축부-9102
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
정제국	강성욱	전결 07/24 김우성

「성동소방서 신축공사 설계공모를 위한」

현장설명회 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(건 축 부)

「성동소방서 신축공사 설계공모를 위한」

현장설명회 개최 결과 보고

성동소방서 신축공사 설계공모를 위한 현장설명회 개최 결과 및 향후 계획을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○	대지위치	:		성동구 행당도시개발구역 공공용시설2블럭(행당동 92-6번지 소재)
○	건립규모	:		지하1/지상4, 연면적 4,950㎡
○	주용도	:		공공업무시설(소방서)
○	사업비	:		308억원
	-토지매입비		:		17,523,000천원
	-예정공사비		:		11,385,000천원(부가세 포함)
	-설 계 비		:		587,433천원(부가세 포함)
○	사업기간	:		2014. 01. ~ 2017. 06.
○	설계기간	:		2014. 11. ~ 2017. 08.(계약일로부터 9개월)
○	위치도 및 현장전경

위치도	현장사진

Ⅱ		추진경위

○ 2012.10.12.  성동소방서 신설계획 수립(시장방침 제316호)

○ 2014.01.29.  성동소방서 설계의뢰(광진소방서 → 건축부)

○ 2014.05.01.  행당도시개발구역 개발계획 변경(사업부지 확정)

○ 2014.06.10.  기술용역타당성 심사

○ 2014.06.13.  서울시 건축정책위원회 자문

○ 2014.06.16.  경영감사담당관 일상감사

○ 2014.06.26.  시설부지에 대한 토지 매매계약 체결(광진소방서 ↔ LH공사)

○ 2014.07.04.  심사위원 선정위원회 개최

○ 2014.07.15.  설계용역 시행 본부장 방침 수립

○ 2014.07.17.  설계공모 공고

Ⅲ		현장 설명회 개최 결과

○ 일    시 : 2014.07.23. 14:00~15:00

○ 장    소 : 사업부지

○ 참 석 자 : 건축사사무소 류연 외 30개사(참석자 명부 별첨)

○ 설명내용 : 설명자료 별첨

○ 참석자 건의사항

- 현장 조성 관련 토목도면(조성 단면도 등)을 공개바람

- 응모신청 접수후 접수자 명단을 공개바람

- 도시계획 관련 자료를 제공 바람

현장설명회 전경

Ⅳ		향후 추진 계획

○ 응모신청자 명단 공개 등 참석자 건의사항을 반영하여 사업추진

- 응모신청 접수자 명단 : 응모접수 후 본부 홈페이지에 공개

- 도시계획 및 조성 관련 토목도면 : LH공사와 협의후 본부 홈페이지에 공개

○ 향후 추진일정

- 2014.07.24. ~ 25. 설계공모 응모접수

- 2014.07.28. ~ 29. 설계공모 질의접수

- 2014.08.01.        질의응답

- 2014.10.23.        작품접수

- 2014.10.29.        작품심사

붙임문서 : 현장설명 자료 – 1부

현장설명 참석자 명부 – 1부.  끝.