투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	GS건설(주) 대표 임병용
(경유)
제목	계약금액 조정절차 이행 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원 드립니다.

2. 우리본부와 귀사간에  계약체결(‘08.05.30)하여 진행중인 『서울 지하철9호선 2단계 917공구 건설공사』와 관련, 930정거장 환승통로 동선변경 결정(도시철도토목부-10772호,‘12.12.18) 으로 인한 설계변경을 추진토록 요청(도시철도토목부-10792호,’12.12.20) 하였고

3. 또한 업무 지시부에 의거 계약금액조정 절차를 이행토록 촉구(‘14.04.22) 하였음에도, ’14.07.25 현재까지도 이루어지지 않고 있어 잔여 차수인 10차 공사 발주등 계약업무에 지장을 초해하고 있어 재 촉구하오니 ‘14.07.31일까지 이행하여 주시기 바랍니다

4. 그리고 진행중인 9차공사는 귀사의 요청(GS건 917 2013-743호,‘13.12.18)으로 준공기한을 7개월을 연기(‘14.01.31→’14.8.31) 하였음에도 공정이 지연되고 있으니 준공기한내 마무리 되어 지하철 9호선 2단계 개통에 지장이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황왕연		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	07/25 代김성호
협조자
시행	도시철도토목부-8152	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청남산별관4층	/
전화	02)772-7210	/전송	02)772-7306	/	hwy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개