투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 책임감리원
(경유)
제목	쉴드TBM 커터교환을 위한 지상그라우팅작업 설계변경 승인 요청 회신

1. 벽산(엔) 제920감리–14–287(2014.7.18)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 지하철 9호선 920공구 건설공사 중 쉴드TBM 커터 교환을 위한 지상그라우팅작업 승인 요청건에 대하여 귀 감리단 검토 의견과 같이 설계변경을 승인하니 안전 시공에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임 : 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김용선		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	전결 07/25 代김성호
협조자	주무관	엄태용
시행	도시철도토목부-8148	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 4층	/
전화	02-772-7242	/전송	02-772-7306	/	kysys2@seoul.go.kr	/	대시민공개