투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	서 울 특 별 시 장(공공디자인과장)
(경유)
제목	‘서울종합운동장 남문환경개선사업’ 추진관련 디자인안 경미한 일부 변경을 위한 협의 요청

1. 공공디자인과-106089(2011.8.5.), 시설관리과-105419(2011.7.12.)과

관련입니다.

2. 상기 호로 결정하여 2011년부터 추진중인‘서울종합운동장 남문환경개선사업’과 관련하여 현장 여건에 따른 일부 변경요인이 있어 협의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

<디자인심의내용>

1) 사 업 명 : 서울종합운동장 남문 주변 환경개선 사업

(심의의결 :  28-6, 2011년제30차)

2) 추진기간 : 2011. 2.～ 2014. 12.

3) 사업내용 : 포장, 수목식재 등

* 남문좌측A구간(3,325㎡), 남문우측B구간(5,800㎡), 남문안측C구간(180m)

4) 추진현황 : 남문좌측A구간(3,325㎡),남문안측C구간(180m) 완료

5) 경미한 변경 요청내용

* 위치 : 남문우측B구간(5,800㎡)

* 내용 : 녹지대 선형, 식재 등 일부 조정 요청(포장재질,패턴은 원안추진)

* 요청사유 : 수목 거수목화에 따른 뿌리생육공간 확보, 고사목 발생, 보행

동선을 고려한 원형녹지대 조정

6) 변경계획도

붙임 : 변경내용 1부. 끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
주무관	안봉환		주무관	이영교		시설개선과장	代박관현		체육시설관리사업소장	07/25 박준양
협조자	주무관	오상호		주무관	우인식
시행	시설개선과-5220	(		)	접수		(		)
우	138-934	서울특별시 송파구 올림픽로 25 서울종합운동장	/
전화	02-2240-8790	/전송	02-2240-8777	/	bongbong73@seoul.go.kr	/	대시민공개