투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(‘14.굴착복구시행도로)

우리 사업소에서 시행중에 있는 『2014년 굴착복구시행도로 정비공사(성동)』에 소요되는 관급자재를 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◦ 요청 사항

연번	사 업 명	계약 번호	품 명	수량	단위	계약자	납품기한		변경 사유	비고
							당 초	변 경
1	2014년 굴착복구 공사용 일반아스콘 구매	12141076100	아스팔트 콘크리트	5,770	톤	중앙아스콘(주)	2014. 7.31	2014.9.20	절대공기부족

붙임 : 준공기한 연기 검토보고 방침서 1부. 끝.

	도로보수과장
주무관	홍수종		도로보수과장	07/25 국중진
협조자
시행	도로보수과-3417	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개