문서번호	총무과-19930
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		최석기	07/25 이혜경
협조
	별관운영팀장		배창호

서소문청사 시설물 정비 공사 시행

(1동 출입구 화강석 보수 및 2동 전면 화단 보수 등)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.

서소문청사 시설물 정비 공사 시행

서소문청사 유지관리를 위한 시설물 정비공사를 시행하고자함.

- 서소문1동(출입구 전면 화강석 보수, 엘리베이터 5호기 바닥 보수, 9층 세무과 용역실 창호설치 1개소), 서소문 2동(전면 화단 턱 보수)

추진개요

○ 공사내용 : 서소문청사 시설물 정비 공사 시행

○ 기    간 : 2014. 7. 19 ~ 7. 25

공사내역

○ 서소문1동 출입구 전면 화강석 보수

- 화강석 판석 들뜸부분 철거 후 재시공(0.9m×2.1m)

○ 서소문1동 엘리베이터 5호기내 바닥 정비 시행

- 인조대리석 크랙 부위 교체 시공(1.45m×1.35m)

○ 서소문1동 9층 세무과 용역실 창호 설치

- 용역실 환기를 위한 창호 신설(0.74m × 1.79m)

○ 서소문2동 전면 화단 및 배수로 정비

- 드라이에리어 배수 불량 및 화단으로부터 유입되는 우수 차단

출입구 전면 화강석	엘리베이터 내부 바닥

창호 설치 위치	화단 및 배수로 정비

○ 소요예산

- 소요예산 : 200만원

- ‘14년 건축물유지관리 공사(연간단가)업체 시행 후 정산

(서소문1동 9층 세무과 용역실 창호 설치 건은 전문업체 선정 시행 : 일상경비지출)

향후일정

○ 2014. 7월 공사 시행 및 정산 처리.  끝.