투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	도림천4복개(우안) 및 봉천천복개 교면포장 시공일정 보고

1. 서울시시설관리공단 공사감독1처-6666호 (2014.7.25)와 관련입니다

2. 우리 사업소에서 2014년 발주하여 시공중인 “도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사” 관련 교면포장 불량구간에 대한 포장 및 교면방수 시공일정을 아래와 같이 보고합니다.

○. 정비기간

- BAS방수 구간 : 8.11(월) ~ 8.14(목) 4일간

- 구스아스팔트 구간 : 8.15(금) ~ 8.16(토) 2일간

- 고탄성아크릴방수 구간 : 8.17(일) ~ 8.24(일) 8일간

○. 공사 시간대 : 22:00~익일 06:00

※ 건설폐기물 용역업체[낙찰업체: 금강환경산업(주)]가 8.1일 까지 계약예정

첨부   1) 포장 및 교면방수 세부일정표 1부.

2) 구스아스팔트 시공계획서 및 공정표 1부.

3) 시설관리공단 관련공문 1부.   끝.

주무관	금종융		시설보수과장	김찬구		남부도로사업소장	07/25 민승기
협조자
시행	시설보수과-3059	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145 (대림동) 남부도로사업소(시설보수과)	/
전화	02-3284-5466	/전송	02-836-3093	/	kum2072@seoul.go.kr	/	대시민공개