문서번호	급수운영과-18369
결재일자	2014.7.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유인행	07/25 代유인행
협조

준공기한 연기보고서

2014.07

강서수도사업소

명에 의하여 「목1동외 17개동 상수도공사」 시행 중인 작업지시(신설36번)건에 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 07.

보고자   직 : 지방시설서기   성명 : 여 수 현

1. 현    황

가. 지시번호 : 신설36번

나. 공사위치 : 목동785-1호

2. 보고내용

가. 공사연기원(접수번호:2089, 2014.7.23)

나. 급수공사 보호통 설치위치에 건축자재가 적치되어 있어 공간 확보시까지 공사시기를 연기요청함.

3. 조치의견

가. 상기와 같은 사유로 인해 당초 공사기간을 아래와 같이 변경하여 급수공사를 시행코자 합니다.

지시번호	공 사 위 치	공 사 기 간
		당 초	변 경
신설36번	목동785-1호	2014.7.17 ~ 2014.7.25	2014.7.17 ~ 2014.8.2

끝.