투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(서울대공원 조절저수지 시설물 긴급 보수보강 공사)

1. 시설과-4421호(2014. 7.24)와 관련입니다.

2. ｢서울대공원 조절저수지 시설물 긴급 보수·보강 공사｣에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 조절저수지 시설물 긴급 보수·보강 공사

나. 공사기간 : 2014. 5.20 ~ 7.27

다. 계약상대자 : 우백건설(주)

라. 변경내역

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
도급액	365,679,000	365,420,000	감) 259,000
관급자재비	32,000,000	21,871,620	감)10,128,380
총공사비	397,679,000	387,291,620	감)10,387,380

마. 설계변경사유 : 공사물량 증감 및 신규공종 추가

바. 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 치수사업, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약상대자 합의서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	문한성		시설과장	07/25 代이춘한
협조자	주무관	김희준
시행	시설과-4435	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 대공원광장로102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7414	/전송	02-507-7230	/	moon29@seoul.go.kr	/	부분공개