문서번호	도시철도계획부-3402
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공정관리과장	도시철도계획부장	도시철도국장
이덕배	김두주	박상돈	07/25 김준기
협 조

- 우이~신설 경전철 민간투자사업 -

통합 공정회의 개최 결과 보고

2014. 07.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『우이~신설 경전철 민간투자사업』

통합 공정회의 개최 결과 보고

우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 효율적인 관리와 원할한 사업추진을 위하여 월간 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2014. 7. 23(수) 15:00 ~ 16:30

○ 장    소 : 도시철도 3층 공용회의실

○ 참 석 자 : 총 11명(도시철도국장, 담당과장, 공사관리관)

□ 회의결과

○ 주요 회의내용

- 공사관리관 공사 추진사항 및 현안사항 보고

- 지장물, 민원발생 등 공정 만회대책

- 사업추진에 따른 문제점 및 향후대책 등

○ 공구별 공정추진 및 현안사항

- 우이~신설 1공구

· 차량기지 구조물 Con’c 타설 및 방수 작업 중

· L1~L3 정거장 : 토공 바닥정리 8월 중 완료

· 본선2구간 : 토공 바닥정리 및 보호벽 Con’C 타설

· 대동천 하수박스 매달기 시행

· 상수도관(D800) 8월 중 이설 예정

- 우이~신설 2공구

· 터널 라이닝 시공 완료(잔여 4.7m 8월 중 완료 예정)

· 본선 1,2,3구간 : 구조물 Con’c 타설 중

· 본선 4구간 : 토공 굴착 준비

· L4 ~ L7 정거장 : 구조물 Con’c 타설 중

- 우이~신설 3공구

· 본선 1터널 : 상반 굴착 완료, 하반 기계굴착 작업 중

(발파작업 경찰서 미 승인 : 조속 협의하여 발파작업 시행)

· 본선 2, 3터널 : 굴진 완료, 보도헌치 및 Lining 작업 시행

· L8 정거장 : 구조물 Con’c 타설 중

· 본선 4터널 : 하반 굴착 중(하도급 타절 및 직영체제 전환 검토)

· L9, L10 정거장 : 기초 Con’c 타설

· 본선 5터널 굴진 완료, 본선 6터널 하반 굴착

- 우이~신설 4공구

· 본선 1,2구간 : Lining 작업 시행

· L11, L12 정거장 : 구조물 Con’c 타설, 환승통로 토공 및 가시설 작업

* E/V 제외 민원 : 훨체어 리프트로 변경(안) 검토

· 본선 3구간 : 금주 내 Lining 작업 완료

· L13 정거장 : 구조물 Con’c 타설, 환승통로 공사 중으로 서울메트로와 기존                  구조물 철거 협의 추진

○ 국장 지시사항

- 지하매설물 보호조치 등 안전관리 및 수해예방 철저.

- 우이 2공구 본선 4구간에서 공정이 단절되어 전체공정에 차질이     예상되는 바, 공정만회대책을 별도 보고 요함.

- 우이 3공구

· 터널 굴착 발파 승인 협의를 적극적으로 수행할 것.

· 하도급 공사구간의 작업 중단으로 전체 개통에 영향을 미치므로 특단의 공정    만회대책을 수립하고 공사 재개는 언제할 것인지 별도 보고 요망.

- 우이 4공구

· 본선 및 정거장 실 작업공정에 비해 관리공정이 늦은 이유가 무엇    인지 분석해서 보고 요망

· L12 정거장 E/V 제외 민원에 대한 대책을 건축부와 협의하여 별도 보고 요망

· 환승통로 작업으로 서울메트로에서 요구하는 광고비용은 사례를 파악, 분석     하여 원칙을 세워 추진하기 바람.

- 모든 분야를 통합하여 공정관리가 필요한 시점으로 선행 공종과,    후속공종이 유기적으로 협력할 수 있도록 정보교환 등 필요함.

- 차량기지 건축, 설비 및 시스템분야 관련부서 담당과장, 담당자는    다음주 회의시 현재 추진사항 및 향후대책을 별도 보고하기 바람.

□ 향후계획

○ 금회 회의결과 부진공정 만회대책 및 지시사항은 즉시 현장 이행

○ 다음 공정회의(‘14.7.30. 15:00) 개최(일정은 다소 변경될 수 있음)

붙임 : 공정회의 사진 1부.  끝.