문서번호	공간정보담당관-7828
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
이용익		김태준	07/28 代박대군
협조

2014년 공간정보 플랫폼 기능 개선 사업

주간보고(7월 4주차)

2014.7.

공간정보담당관

주간업무보고서
사 업 명		2014년 공간정보 플랫폼 기능 개선 사업
기 간		2014.07.21.~2014.7.25.(7월 3주차)			보 고 일	2014년 7월 25일
수 신 처		부 서		서울시 공간정보담당관	담 당	이용익 주무관
발 신 처		회 사		(주)다울지오인포	담 당	김재호 부장
주 요 내 용		○ 서울형 지도태깅 공유마당 화면 구성안 기획 ○ 다국어 검색 모바일 웹 개발 작업 ○ ‘스마트서울맵’ 통신사 마켓 등록
	분류		업무 진행 현황				진행율
금주 실적	분석/계획		○ 서울형 지도태깅 공유마당 화면 구성안 설명 및 수정 작업 - 7월 21일 제출 - 7월 22일 수정작업				80%
	운영		○ CMS 기능 수정 및 업데이트 작업 진행 - 일괄 등록시 엑셀 파일 오류일 때 기존 데이터 삭제 현상 수정 ○ 아이폰 어플리케이션 수정 등록 - 공지사항 ‘링크 연동 오류’ 수정 - 이전 버튼 사라짐 현상 수정 - 7월 24일 등록 및 검수 진행 중				100% 진행 중
	구축		○ 서울형 지도태깅 공유마당 시안작업 - 작업내용 : 메인 및 에디터 시안 - 내용 변경에 따른 재 시안 작업 진행				50%
	지도태깅 콘텐츠		○ 서울형 지도태깅 로고 가이드 제작				100%
차주 계획	분석/계획		○ 서울형 지도태깅 공유마당 화면 구성안 설명 및 수정 작업 - 7월 28일 제출 - 7월 29일 업무 미팅 진행 예정				100%
	운영		○ CMS 기능 수정 및 업데이트 작업 진행 - 이미지 등록 사이즈 자동 변환 - 아이콘 등록 / 공지사항 이미지 등록 등 다양한 이미지 업로드 테스트 진행 중 ○ 아이폰 어플리케이션 수정 등록 - 검수 진행 후 등록 진행 ○ 7월 운영 통계 보고서 작성 ○ 공간정보 플랫폼 리플렛 작업 - 디자인 시안 작업(1차) : 7월 30일				100% 100% 100%
	구축		○ 서울형 지도태깅 공유마당 디자인 시안 작업 - 작업내용 : 메인/에디터/시뮬레이터 시안 - 8월 1일 제출 예정				100%
	지도태깅 콘텐츠
산출물	○ 서울형 지도태깅 공유마당 스토리보드_20140722(안).pptx ○ 공유마당_디자인시안 - 공유마당_디자인시안_0722(1차안).pptx - 서울형지도태킹 공유마당_1차시안_20140721.zip ○ 서울형지도태킹 가이드라인 - 서울형지도태킹 가이드라인_20140725_ver1.0.pdf - 서울형지도태킹 가이드라인ver1.0.ai ○ 프로그램 산출물 - CMS 업데이트 : 일괄 등록 오류 수정
이슈사항	○ 다국어지도 검색 모바일 웹 검색 페이지 운영 - 테스트 서버 운영(현) - 도메인 설정 후 WAS 서버 등록
협조 사항
對 서울시	○ 제니퍼 버전 업데이트 일정 협의 - 데이터 센터 요청 사항 : 제니퍼 버전 업데이트 진행을 위한 83서버 원격 데스크탑 연결 작업 요청 - 제니퍼 요청 사항 : 제니퍼 버전 업데이트 일정 확정
對 용역업체	○ 리플렛 작업 진행 - 7월 27일 ~ 7월 30일 : 1차 디자인 시안 제출
기타	○ 웹 서비스 도메인 신청 여부 결정 - 도메인 결정 및 신청 시기 결정 - SSL 공인인증 신청 여부 확인
주간 보고서 협의 사안
○ 공간정보플랫폼 업무 보고 및 진행 과정 보고
주간보고 회의내용
○ CMS 등록시 개선사항 논의 ○ ‘스마트서울맵’ 타 서비스 이동시 안내 문구 수정 - 사용자가 이해하기 쉽고 거부감 들지 않도록 변경 적용 ○ 웹 서비스 도메인 신청 여부 결정 - 도메인 명칭 결정 필요 - 공인인증 신청 여부 확인: 하위 도메인일 경우 신청 여부 확인 ○ 차주 스케줄 논의 - 서울형 지도태깅 공유마당 스토리보드 회의: 7/29(화) - 기타 일정은 업무보고 내용에 맞게 추진