문서번호	방재시설부-6845
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	07/28 임춘근
협조

면목4동 배수관로 설치공사

작업여건(주간→야간) 변경에 따른 검토 보고

2014. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

면목4동 배수관로 설치공사

작업여건(주간→야간) 변경에 따른 검토 보고

면목4동 배수관로 설치공사에 따른 작업여건변경(주가→야간)사항에 따른

서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토   보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m,

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

실정보고 내용

❍ 배수관로 부설 작업여건 변경(주간→야간)

- 위   치 : 면목4동 727-121(한마음교회) ~ 면목로 27길

- 규격 및 연장

․ PC박스(□1.0m×1.0m) 55m, 흄관(ø800mm) 73m

- 변경사유

․ 상기위치는 주간에 공사토록 설계되어 있으나 서울시 간선도로인

동일로를 횡단하여야 하는 실정으로 교통처리계획심의시 야간에

공사토록 심의를 득하였으며

․ 한마음교회 주차장 출입구에 위치하고 있어 주간 출입차량으로 인해      야간공사가 불가피한 실정임

감리검토내용

❍ 간선도로인 동일로는 주간에 차량 교통통제가 불가능하고 서울시 규제심의시 야간공사토록 심의된 사항이며

❍ 주간 차량 진,출입이 많은 한마음교회 주차장 구간 및 동일로 진입로(면목로27길)는 차량신호 및 통행에 지장이 없는 야간에 공사함이 불가피하다고 사료됨

․ 공사개요

구 분	관종 및 구경	연 장	비 고
계	흄관(ø800mm) PC박스(□1.0m×1.0m)	73.4m 55.3m
동일로 북측 (의정부방향)	흄관(ø800mm) PC박스(□1.0m×1.0m)	19m 45.3m
동일로남측 (영동대교방향)	흄관(ø800mm) PC박스(□1.0m×1.0m)	54.4m 10m

․ 소요공사비 : 증) 20,427천원

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 공사비 증,감내역서 1부. 끝.