문서번호	방재시설부-6846
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	07/28 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

되메우기토사 임시적치장 및 교통안전시설물 설치 검토 보고

2014. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

되메우기토사 임시적치장 및 교통안전시설물 설치 검토 보고

면목4동 배수관로부설공사에 따른 되메우기토사 임시적치장 운영 및 교통  시설물설치에 따른 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

실정보고 내용

❍ 되메우기용 토사 가적치

- 위   치 : 면목4동 727-121(한마음교회) ~ 면목로 27길

- 규격 및 연장

․ PC박스(□1.0m×1.0) 57m, 흄관(ø600~800mm) 305m

- 상기위치는 왕복2차로(편도1차로)로서 공사 시 편도 1개차로를 점유하여 차량교행 상태에서 배수관로를 부설하여야 하는 실정으로

- 보행자 통행이 많고 상가 밀집지역으로 되메우기용 발생토사를 현장에 적치하기가 곤란한 실정으로 토사 임시적치장 운영이 필요한 실정임

❍ 교통시설물 설치 반영

- 면목4동 배수관로 설치공사에 따른 간선도로인 동일로 횡단시 교통처리계획에 따른 공사안내간판 등 교통안전시설물 설치비용이 설계에 미  반영된 상태임

감리검토내용

❍ 현재 미 착공중인 공릉2빗물펌프장에 되메우기용 토사 임시집하장으로   활용하여 현장 발생토를 즉시 반출하여 공사장 비산먼지로 인한 주변 상가피해 및 주민 통행불편을 줄이고자 하며

- 토사 임시적치장 : 공릉2빗물펌프장 현장

- 임시적치장 거리 : 6.1km, 토사량(되메우기용) : 986㎥

- 소요공사비 : 15,180천원

❍ 동일로 횡단에 따른 교통시설물설치 비용을 반영하여 공사관리에 만전을 기하고자 함

- 교통안내간판 : 20개소, 싸인보드카 : 2개소/일

- 소요공사비 : 9,218천원

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 되메우기용 토사 공사비 산출서 1부.

3. 단계별 교통처리 계획 및 교통시설물 설치도면 1부.

4. 교통시설물 공사비 산출서 1부.. 끝.