문서번호	토목부-14534
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	07/28 노우성
협조
	주무관		양준식

지장물(파고라) 대체시설설치 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

지장물(파고라) 대체시설설치 검토보고

화물지하차도 공사를 위한 양재대로 확장(2개차로)으로 저촉되는 지장물(파고라) 이설 협의 결과, 서초구청에서 대체시설 설치를 요구하고 있어 검토 결과를 보고드림

관련근거

❍ 토목부-2824호(`14.2.14.) 파고라 이설 요청

❍ 서초구 공원녹지과-3783호(`14.2.25.) 파고라 이설 회신

❍ 동기강 2014-145호(`14. 7. 4.) 파고라 해체에 따른 대체시설물 설치 승인 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 1개소, 지하차도 3개소)

❍ 공 사 비 : 221,555백만원 (7차: 8,906,500천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(7차 `13. 5. 9.~`14. 9.30.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1,   ❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

현 황

❍ 화물터미널앞 지하차도공사를 위하여는 양재대로 2개차로 추가 확장이 필요함.

❍ 양재대로 추가 확장구간에 서초구에서 관리하고 있는 파고라가 저촉되어 이설 협의결과 철거 후 대체시설(등의자 20개) 설치를 요구함

※ 서초구청에서는 대체시설을 양재천근린공원(양재동 99-5)에 설치 요구

❍ 위 치 도

기존 파고라 위치	등의자 설치 위치(양재동 99-5)

문 제 점

❍ 양재대로 확장구간에 설치된 지장물(파고라)을 존치한 상태에서는 교통처리 등 화물터미널앞 지하차도 공사 추진이 어려움

❍ 대체시설(등의자) 설치로 인한 공사비 증액 발생

조치계획

❍ 양재대로 추가 확장구간에 설치된 지장물(파고라)을 제거하지 않고는 공사추진이 어려운 바, 원활한 공사추진을 위하여 지장물 관리기관인 서초구 의견(서초구 공원녹지과-3783, ‘14.02.25)을 반영 대체시설 설치

구 분	1안	2안	3안
규 격	1,520×650×H800	1,600×660×H780	1,680×650×H840
제 품 사 진
설계단가	430,000원/EA	430,000원/EA	530,000원/EA
수 량	20EA	20EA	17EA
적 용	(서초구청 요구안)

❍ 대체시설 설치로 증가되는 공사비(8,569천원)는 감리보고 내용에 의거 설계변경 추진하여 도급비에 반영코자 함

❍ 공사비 증･감 현황                                      (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
1. 등의자 설치	-	7,074	7,074
2. 제경비	-	716	716
3. 합 계	-	7,790	7,790
4. 부가세	-	779	779
총 공 사 비	-	8,569	8,569

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 서초구청 회신공문서 1부.  끝.