문서번호	시설보수과-5455
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
최완		정재현	07/28 이승진
협 조

재난위험시설(D등급) 북악스카이웨이1교 외부전문가 합동점검 추진계획

2014 . 7

북부도로사업소

[시설보수과]

－북악스카이웨이1교－

재난위험시설(D등급) 합동점검 계획

재난위험시설 D급으로 지정된 북악스카이웨이1교에 대하여 관리계획에 따라

외부전문가와 합동으로 점검을 실시하여 재난예방에 만전을 기하고자 함

1		관리계획 근거

	시설보수과-3875호(2014.05.29.)와 관련임

⇒ 재난위험시설(D등급) 북악스카이웨이1교 관리계획

2		시설물 현황

	북악스카이웨이1교 개요

○ 위    치 : 성북구 정릉2동 544-1

○ 시설규모 : 폭(8.35m), 연장(L=60.0m (4@15.0m))

○ 구조형식 : 상부-RCT빔, 교각-T형, 교대-반중력식(법정 외)

○ 준공년도 : 1970년 4월, 설계하중 DB-18

○ 위치도 및 전경

위치도	전 경
북악스카이웨이 1교

3		추진현황

	북악스카이웨이1교 정밀안전진단용역

○ 용역기간 : 2013. 12. 23  ∼  2014. 5. 30

○ 용역결과 : 공용기간 44년이 경과한 법정외 도로교로서

- 슬래브 두께부족(부재두께:150mm / 현행기준:220mm)

- 주형 철근량 부족(기본내하력 안전율 저하)

- 열화진행 심화 (콘크리트 및 철근 단면결손, 염해진행)

- 종합평가결과 【D등급】

	재난위험시설 D급 지정후 조치완료 현황

○ 2014. 05. 29 : 차량의 운행제한(32톤⇒21톤) 변경 공고

○ 2014. 06. 12 : 재난위험시설의 지정 고시(서울특별시고시 제2014-220호)

○ 2014. 06. 23 : 속도제한(40Km/h ⇒ 30Km/h) 표지판 설치

○ 2014. 07. 12 : 가설벤트(2개소) 및 낙하방지시설 설치(S2)

	북악스카이웨이1교 긴급보수공사(슬래브 단면보수) - 진행

○ 공사기간 : 2014. 06. 30  ∼  2014. 08. 28

○ 총공사비 : 127,000천원(계약금액 108,961천원)

○ 도 급 자 : ㈜씨타유진아이디   대표 유진환

○ 공사내용 : 재난 예방을 위한 시설물 위험구간(S2) 안전성 확보

- 슬래브 단면보수 100㎡, 신축이음보수 40m

4		점검일정

	외부전문가 합동점검

○ 점검일시 : 2014. 07. 31(목) 11:00 ~

○ 점검대상 : 북악스카이웨이1교

○ 점검시설 : 가설밴트, 슬래브, 빔, 교각, 교대, 신축이음부

○ 점 검 자 : 외부전문가 : 이채규 자문위원(한국구조물안전연구원)

내부점검자 : 시설보수과장, 시설물 담당자

○ 점검목록

- 설치된 가설밴트 및 낙하방지설 안전성 검토

- 슬래브 단면보수 시공계획 검토

- 슬래브(S2)구간 정비시 보수방법(단면보수, 상판치환) 선정

- 빔, 교각, 교대, 신축이음부 손상상태 진행여부 확인

5		행정사항

○ 시공계획서 검토 지적사항 보완후 사업 시행

○ 시설물 점검 지적사항중 경미한 사항은 즉시 보완조치 반영하고

중대한 사항은 진행중인 설계용역사에 검토지시 대책방안 강구

○ 외부전문가 점검의견에 따라 슬래브 단면보수 방법 선정

○ 자문비 지급(200,000원) : 시공계획서 검토 및 현장 시설물 점검비

첨부 : 자문의견서 1부.   끝