투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설 경전철(주) 대표이사 민우영 귀하
(경유)
제목	2014년도 시설비 예산 집행 가능여부 및 공기연장에 따른 감리원 투입에 대한 의견 조회

1. 우이(관리) 제2013-128호(2013.6.20.)와 관련입니다.

2. 위 대호로 제출한 2014년도 도시철도 건설사업비 예산편성자료와 관련하여 시설비(42,147백만원)에 대한 집행 가능여부를 2014. 7. 30한 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 26.5개월 공기연장에 따라 감리용역도 연장이 불가피하고 이에 따른 감리원의 추가 투입이 필요한 실정으로서, 향후 이에 소요되는 비용은 총사업비 변경과 관련된 사항이므로, 2015년도 적정 감리비 예산 편성을 위한 공사 기간별(종료시까지) 토목분야의 감리원 배치계획에 대한 귀 사의 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박형복		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	07/28 한동근
협조자	주무관	안규홍
시행	도시철도사업부-4285	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동 산5-85) 서울시청 남산별관	/
전화	02-772-7180	/전송	02-772-7305	/		/	대시민공개