문서번호	급수운영과-16894
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이철	김기상	전결 07/28 장시명
협 조

설계변경 사전심의 결과보고

(2013년 관악구 및 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리 용역-최종)

2014. 7.

명에 의거 관내 『2013년 관악구 및 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리 용역』 에 대하여 설계변경 심의위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7. 28

보 고 자  직 :  지방시설주사보 이철

□ 공사 현황

○ 용 역 명 : 2013년 관악구 및 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리 용역

○ 용역개요

- 당초 : 폐기물운반 2,063㎡, 폐기물처리 2,966톤

- 변경 : 폐기물운반 1,640㎡, 폐기물처리 2,954톤

○ 용역기간 : 2013.07.04. ~ 2014.07.30.

○ 용역금액

- 당초 : 79,622,000원

- 변경 : 71,929,000원(감7,693,000원)

○ 수 급 사 : 마평산업개발㈜  대표 박병식

□ 설계변경 심의 위원회 개최

○ 일    시 : 2014. 7. 28(월). 15:00

○ 장    소 : 3층 급수운영과 사무실

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장(1명), 심의위원(시설관리과 3명)

급수운영과 김기상 외 1인

□ 심의 위원회 검토 내용

○ 시공물량 증ㆍ감에 따른 집계표의 수량 상이 여부 검토

□ 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	용역원가	72,383,637	65,390,002	감 6,993,635
	부 가 세	7,238,363	6,538,998	감 699,365
	계	79,622,000	71,929,000	감 7,693,000

□ 처리의견

○ 우리사업소 설계변경 심의 위원회에서 변경설계도서에 대하여 위 사항을 검토결과 적정하게 설계변경된 것으로 심의된 바 원안 처리코자 합니다.

첨부 :  설계변경 심의 의결서 1부. 끝.